문서번호	시설과-1120
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
박진우		홍순철	04/07 변규열
협조

「시민의숲 CPETD조성 전기공사」

설계변경(정산) 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「시민의숲 CPETD조성 전기공사」

설계변경(정산) 검토보고

공사현황

❍ 공 사 명 : 시민의숲 CPETD조성 전기공사

❍ 공사개요 : 공원등설치 12본,화장실 전기공사 5개소,옥외등설치12개소

❍ 계약금액 : 19,880,000원

❍ 공사기간 : 2013. 12. 11 ～ 2014. 04. 09

❍ 도 급 자 : 남성전력엔지니어링(주)  대표 김성경

주요 설계변경사항

공 종	당 초	변 경	변경사유	비 고
공원등 공사	▷가로등 연접접지선 누락 - F-GV 6㎟ : 66m	▶가로등 연접접지선 시공 - F-GV 6㎟ : 315m	현장실정 반영	시설과 -10355호
	▷기초설치 - 현장타설 : 12개소	▶기초설치 - 기성기초 설치 : 12개소
재경비	▷보험료 - 건강보험료,노인장기요양 보험료,연금보험료 : 반영	▶보험료 -건강보험료,노인장기요양 보험료,연금보험료 : 정산	시공사 보험 미가입

변경금액

❍ 공사비 : 감 946,000원

[단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
도급비	공급가액	18,072,728	17,212,728	감)860,000
	부가가치세	1,807,727	1,721,272	감)86,000
	계	19,880,000	18,934,000	감)946,000

조치의견

❍ 상기 감독부서(시설관리공단)의 설계변경 보고와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 함.

붙 임 : 1) 시설관리공단 보고서 1부

2) 설계변경내역서 1부. 끝.