상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 통보[테니스장 보수공사]

정수시설과-4317(‘17.06.01)호와 관련하여 공사계약 변경 체결한 사항을 별첨과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 테니스장 보수공사

나. 계약업체 : 주식회사 장안, 대표 이 덕 진

다. 계약변경 내역

1) 준공기한 : 2017.04.25 ~ 2017.06.06(변경 없음)

2) 계약금액

○ 당초 59,826,470원 → 변경 68,500,000원(증8,673,530원)

3) 변경사유

○ 와이어메쉬 깔기 등 신규공종 물량 추가발생

라. 변경계약 일자 : 2017. 06. 01

붙임 : 1. 변경 계약서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 변경 계약보증금 1부.

5. 공사계약 일반조건 1부

6. 서울시 공사계약 특수조건 1부. 끝.

	정수운영과장
주무관	윤충용		행정관리팀장	권영철		정수운영과장	06/02 정선교
협조자
시행	정수운영과-6958	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5312	/전송	02)3146-5309	/		/	부분공개(7)