상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	친환경 녹색 정수장 조성공사 폐기물처리 용역 설계변경 계약의뢰

영등포아리수정수센터 내 「친환경 녹색 정수장 조성공사 폐기물처리 용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주기기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 친환경 녹색정수장 조성공사 폐기물처리 용역

2. 위    치 : 영등포아리수정수센터(영등포구 노들로 11)

3. 용역기간 : 2017. 4. 7. ~ 2017. 6. 5.

4. 도  급자 : 금강도시환경㈜  대표 이상훈

5. 용 역 비

○ 당  초 : 5,700,000원

○ 변  경 : 5,434,000원(감266,000원)

6. 변경사유 : 실제 사업장내에서 발생한 폐기물량으로 설계변경 시행

7. 예산과목 : 깨끗하고안전한아리수생산, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,                         수선유지비(친환경녹색정수장조성)

붙 임 : 변경내역서 1부.  끝.

	생산관리과장
주무관	한광수		생산관리과장	06/02 한희선
협조자
시행	생산관리과-6822	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개