상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	생산관리과장
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 안내 [영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성공사 관급자재(초화류 등) 구매]

1. 생산관리과-6553(2017. 5. 29.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성공사 관급자재(초화류 등) 구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성공사 관급자재(초화류 등) 구매 계약

나. 계약업체 : ㈜현대장미원 외 5개사

다. 계약금액 : 74,449,100원

라. 변경내용 : 계약금액 변경

구 분	당초	변경	비 고
물품금액	74,449,100원	71,924,600원	감 2,524,500원

마. 변경 사유

- 현장여건 점검 결과에 따른 자재 물량 변경

- 준공 시기에 개화하는 초화류로 품목 변경

따로붙임 : 변경 계약서 1부. 끝.

	재무회계과장
주무관	황한범		재무회계과장	06/02 박병식
협조자
시행	재무회계과-7713	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	대시민공개