문서번호	설비부-3677
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
배수웅	조예환	04/07 박기형

- 2013년 상반기 액션미팅 실행계획 추진 관련 -

태양광 확대를 위한 캐노피형 태양광 설치

2014. 4.

도시기반시설본부

설  비  부

태양광 확대를 위한 캐노피형 태양광 설치

에너지 절감을 위한 태양광 설비 확대 보급 일환으로 서남권야구장내 매표소 상단에 캐노피를 설치하여 우기시 이용시민 불편해소 및 태양광 발전으로 에너지도 절감할 수 있는 방안 마련

Ⅰ		추진개요

2013년 상반기 동아리 액션미팅 개최

○ 일시 : 2013. 6. 21 ~ 22일(1박2일)

○ 주제 : 에너지 절감을 위한 태양광 설비 확대 보급 방안

액션미팅시 도출된 문제점에 대한 추진계획 검토

○ 자연채광과 전기발전을 할 수 있는 캐노피형 태양광 설치 추진

그간 추진 경과

○ ‘13. 6. 21~22  액션미팅 실시 및 활동계획 마련

○ ‘13.6.23~7.31  캐노피형 태양광 기술자료 수집

○ ‘13.8. 1~8.16  실행 대상지 결정(서남권야구장 매표소 상단)

○ ‘13.8월~9월말   실행방안에 대한 감리, 시공사 측과 협의

○ ‘13.11.22       매표소 상단에 캐노피 및 태양광 설치 방안 결정

○ ‘13.12.18~31   설계변경 결정 및 변경 계약 완료

○ ‘14.1월 ~ 현재   태양광지지 구조물 설치완료(6월경 태양광 설치)

Ⅱ		세부 추진내용

서남권 야구장 외야 매표소 상단에 캐노피 및 태양광 적용

○ 외야 매표소 이용 시민의 불편 해소

- 서남권 야구장 외야 매표소를 이용할 경우 우기시 비가림막이 없고,

하절기 태양 빛을 직접 받게 되어 이용 시민 불편

- 매표소 상단에 캐노피를 설치하고 캐노피에 태양광을 설치하여, 매표소

이용 시민이 우산, 양산 없이 자유롭게 이용 가능

- 태양광 발전을 통해 에너지 절감과 대외적 홍보효과 극대화

○ 기존 지붕이용 태양광의 문제점 해소

- 당초 돔 지붕 상부에 태양광을 설치 예정이었으나, 발전효율 저하, 지붕

하중 증가 문제, 색상 불일치(돔지붕 : 은색계통, 태양광 : 파란색 계통)로               미관 저해 등의 문제점 상존

- 외야 캐노피 이용으로 기존 문제점 해소

적용 내용

기존 계획	캐노피 및 태양광 설치(안)
	캐노피 추가 및 태양광 설치

※ 액션미팅시 BIPV를 검토하였으나, 캐노피 하중문제, 발전효율 문제 등을

감안 고효율 PV로 변경 적용

Ⅲ		추진상황 및 향후 계획

현재 추진상황

○ 설계변경 완료 및 캐노피 구조물 설치

- 태양광을 설치 할 수 있는 캐노피 구조물 구조검토 및 구조물 설치완료

‘14년 4월 현재 태양광용 캐노피 구조물 공사 완료

○ 태양광 등 신·재생에너지 추가 설치 대상 검토

- 서남권 야구장 기능개선 등 설계변경이 진행 중으로 태양광 등에 대한

추가 설치 대상 검토중

- 생활체육시설 관리동 지붕 태양광 설치 등 다각도 검토

향후계획

○ ‘14. 5월~6월  태양광 설치 완료

※ 현재 기능개선 등 설계변경이 진행 중에 있어 태양광 설치시기는 설계

변경 진행상황에 연기될 수 있음.

Ⅳ		기대효과

매표소 상단 캐노피 설치로 민원불편 해소

캐노피에 태양광 설치로 에너지 절감 및 친환경 홍보 효과

타 시설물, 건축물 등에 횡단전개 가능

태양광 확대보급에 기여