문서번호	기술심사담당관-10287
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제138호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		06/05 이제원
협 조
	기술관리팀장		조현석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(5월)

2017. 6.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(5월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 5월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 5. 17.(수)	2017. 5. 27.(토)	2017. 5. 30.(화)	비 고
공 사 명	지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구)	지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사	100주년기념 시민문화교육관 건립공사
사업부서	서울메트로 토목사업소	도기본 도시철도토목부	서울시립대 시설과
공사기간 (공정률)	‘16.01.25.~ ’18.01.23.(24%)	‘10.09.16. ~ ’18.12.31.(83%)	‘16.07. ~ ’18.06.(33%)
점검자	· 영진엔지니어링 김상석 · 제일엔지니어링 김희욱 · 진우엔지니어링 안삼현 (직원 : 기술관리팀 2)	· ㈜건화 이상환 · 한국구조물안전연구원 이채규 · 동우기술단 김영환 (직원 : 토목심사팀 2)	· 에이톰엔지니어링 강창선 · 필건축사사무소 박현식 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 가시설 및 토공, 안전물 설치상태 등 시공상태 확인

- 지하차도 및 가시설 시공상태 점검

- 현장 안전관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․안전․공정관리 등 시공관리

- 설계도면 관리상태 및 시공상세도 작성상태 점검

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	28	12	7	9
지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구)	5	-	5	-
지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사	12	4	-	8
100주년기념 시민문화교육관 건립공사	11	8	2	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 출입구 및 환기구 마무리 철거구간 시공 시 다음사항을 유의할 것

․되메우기 구간 토류판 철거 및 접속부 다짐시공 유의

․대형 상수도관 보호관리 유념

․철거 장비 주변 안전확보(서울시지하철9호선3단계 922공구 건설공사)

- 종합운동장역 기둥연성 보강도면(8, 9)의 지하 2층 승강장 기둥하면이 현장상태와 상이하므로 확인 후 수정보완 할 것(지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구))

- 승강장을 통하여 펌프카로 바닥콘크리트를 타설하면서 보행자 안전을 위한 라바콘, 유도표식 등 안전시설 미설치(서울시지하철9호선3단계 922공구 건설공사)

- 민가측 토류벽과 석축사이 공간 되메우기 시 석축의 느슨해짐 현상 대비 요망(100주년기념 시민문화교육관 건립공사)

- 동바리 및 거푸집 설치상태가 미흡하므로 구조계산서, 조립도 등을 참고하여 보완할 것(100주년기념 시민문화교육관 건립공사)

품질관리 분야

- 아라미드섬유 마감공법에 대한 시공상세도 작성상태가 일부 미흡하므로 현장에 맞게 재작성하여 감리단 승인을 받을 것

(지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구))

- 내진보강 공사 시 본체 구조물 손상 부분에 대해 철저히 보수 후 내진보강공사를 시행할 것(지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구))

- 구조물 방수Sheet 보호재의 경우 다짐 시 탈락이 우려되므로 시공관리 철저 요함(서울시지하철9호선3단계 922공구 건설공사)

- SRC 기둥 주근의 피복두께 부족하지 않도록 시공관리 철저히 할 것.

(100주년기념 시민문화교육관 건립공사)

기타 분야

- 대형 상수관로(d=2,200)의 하부 채움 후 다짐 시공 시 철저요함(서울시지하철9호선3단계 922공구 건설공사)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.