문서번호	보행정책과-6618
결재일자	2017.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보행시설팀장	보행정책과장
이종석		박영기	06/07 이방일
협조
	보행정책팀장		김현중

종로 보행특구 내 보행자안내표지판 정비 계획

2017.  6.

종로 보행특구 내 보행자안내표지판 정비 계획

종로 보행 특구 내 오랜된 보행자안내표지판에 대하여 보행정보를 정비하여 보행자의 편의를 증진하고자 함

□ 추진근거

○ *************************************

- ********************

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 종로 보행특구 내 보행자안내표지판 정비

○ 위    치 : 종로 보행특구를 포함한 인접 보행자안내표지판 57개소

○ 사업기간 : 2017. 6 ~ 12.

○ 사업내용 : 구형 보행자안내표지판을 “서울시 표지형디자인” 으로 교체 및 안내지도 변경 등

○ 사 업 비 : 금41,660천원(시비)

- 예산과목 : 보행정책과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 보행편의시설 확충 및 정비, 시설비(202-401-01)

□ 추진방향

○ 권역지도 표시 반경이 1.5km로 종로보행특구 내 보행자안내표지판에 미 기재된 서울로7017 표기

○ 보행지도 표시 반경이 0.5km로 종로보행특구 내 보행정보 정비

○ 종로보행특구 특성 및 이용자를 고려한 보행자안내표지판 정비

□ 정비계획

○ 구형 보행자안내표지판을 서울형 표준디자인으로 시트지 등 교체

구 형		서울형 표준디자인

○ 주변지도 표시 방법 변경

구 형		서울형 표준디자인
			권역지도 (반경 1,500m 내외)
			보행지도 (반경 500m 내외)
범 위 : 가로 1,000m, 세로 2,000m

○ 정확한 외국어 표기 기재

- 서울시 외국어 표기사전 활용(http://dictionary.seoul.go.kr/spelling/dictionary)

- 불명확한 외국어는 서울시 관광사업과에 외국어 표기 자문 요청

□ 소요예산 : 41,660천원

○ 보행자안내표지판 지도 제작 등 용역비 20,000천원

○ 보행자안내표지판 양면 시트지 등 교체 21,660천원

- 380,000원 × 57개소(양면) = 21,660,000원

※ *************************************

□ 추진일정

❍ ‘17. 6월    : 예산재배정

❍ ‘17. 7~12월    : 공사시행 및 준공

□ 향후계획

○ 예산재배정 41,660천원(6월중) -------------- (시 → 종로구)

○ 공사시행 및 준공 ---------------------------- (종로구)

○ 사업완료에 따른 정산 및 결과 보고(12월말) -- (종로구 → 시)

붙 임 : 종로보행특구 내 보행자안내표지판 위치도 1부.

끝.