문서번호	정수시설과-1997
결재일자	2017.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	06/07 임철수
협 조
	주무관			하수용

인조잔디 및 충진재 물량변경 보고

2017.  6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

인조잔디 및 충진재 물량변경 보고

인조잔디구장 조성공사 시행 중 인조잔디 및 충진재 물량 변경사항이 발생하여 조달계약 금액을 변경하고자 보고 드림

□ 조달구매 내역

○ 계약건명 : 인조잔디 및 충진재 조달구매(품명 : 인조잔디)

○ 설치기간 : 2017. 4. 27. ~ 2017. 6.6

○ 계 약 일 : 2017. 4. 27.

○ 계약금액 : 금 378,000,000원

○ 계 약 자 : 가온 주식회사 대표 조현정

○ 계약내역 : 인조잔디 7,335㎡(현장설치도)

□ 변경내용

○ 축구장 규모 변경(98m×64m ⇒ 100m×64m)에 따른 인조잔디 및 충진재 물량 증가

품 목	규격	단위	수량		증가	비 고
			당초	변경
인조잔디및충진재	t=55mm (SEBS충진재)	㎡	7,335	7,476	141	축구장 확장

○ 금액변경

구 분	금액		증액	비 고
	당초	변경
도급비	378,000,000	385,000,000	7,000,000

□ 조치계획

○ 상기 변경내용에 대해 조달청에 계약 변경을 요청하고 재계약 후   검수·지출코자 합니다.

붙임 : 1. 변경내역서 1부. 끝.