	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	용역 설계변경 요청(제1차제1회, 밤고개로확장공사외1 건설사업관리용역)

우리본부에서 시행중인 “밤고개로 확장공사외 1 감독권한대행등 건설사업관리용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아  래

1. 용 역 명 : 밤고개로 확장공사외 1 감독권한대행등 건설사업관리용역

2. 용 역 비 : 1,048백만원 (1차: 51백만원)

3. 용역기간 : 2017.01.09. ~ 2018.12.30.(총차)

4. 용역업체 : 제일엔지니어링(60%), 삼안(40%)

5. 예산과목 :

새문안로중앙버스 전용차로 설치공사	교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 종로·남대문로 중앙버스전용차로 설치, 시설비 및 부대비, 시설비
밤고개로 확장공사	도로계획과, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 밤고개로 확장, 시설비 및 시설비, 시설비

6. 설계변경 내역

○ 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 차	`17.1.9 ~ `18.12.30 (24.0월)	`17.1.9 ~`18.12.30 (24.0월)	0	변경없음
1 차	`17.1.9 ~ `17.6.30 (1.38월)	`17.1.9 ~`17.12.31 (11.41월)	(증) 10.03월
새문안로중앙버스전용차로 설치공사	`17.1.9 ~ `17.6.30 (1.38월)	`17.1.9 ~ `17.5.31 (4.86월)	(증) 3.48월
밤고개로 확장공사		`17.6.1 ~ `17.12.31 (6.55월)	(증) 6.55월

○ 용역비용 변경

[금액단위 : 천원]

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 차	1,048,700	1,048,700	0	변경없음
1 차	51,000	643,500	(증) 592,500
새문안로중앙버스전용차로 설치공사	51,000	212,300	(증) 161,300
밤고개로 확장공사	-	431,200	(증) 431,200

붙 임 :  1. 검토의견서 1부

2. 설계변경 내역서(제1차제1회) 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 관련 방침 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	전결 06/07 김영수
협조자	경리과장	최정수
시행	토목부-11625	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)