투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	(주)장영실 대표 이재호 귀하
(경유)
제목	지연배상금 부과 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「질소농축기 구매」 계약 건과 관련하여 물품납품이 지연되어 다음과 같이 지연배상금을 부과함을 알려드립니다.

1). 계약 및 납품내역

가. 건      명 : 질소농축기 구매

나. 계약상대자 : ㈜장영실 (대표자 : 이재호)

다. 계약금액 : 금16,830,000원(금일천육백팔십삼만원)

라. 계약일자 : 2017. 4. 21.

마. 납품기한 : 2017. 5. 21.

바. 납품일자 : 2017. 5. 29.

사. 검사일자 : 2017. 5. 31.

2). 지연배상금 : 금121,170원(금일십이만일천일백칠십원)

가. 산출내역 : 16,830,000원(계약금)×0.08%(지연배상금률)×9일(지체일수)

3). 지연배상금 부과 : 대가지급시 지연배상금을 제외한 금액만 지급.  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	유경옥		경리팀장	최동철		연구지원부장	06/09 이형우
협조자
시행	연구지원부-7921	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 (주암동)	/
전화	02-570-3345	/전송	02-570-3320	/	yko04@seoul.go.kr	/	부분공개(7)