문서번호	정보시스템담당관-6744
결재일자	2017.6.9.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
김연숙		김기항	06/09 고경희
협 조
	정보자원운영과장			김영숙
	인터넷통신과장			황기원

모바일오피스 성능테스트 추진 계획

2017. 6.

정 보 기 획 관

(정보시스템담당관)

모바일오피스 성능테스트 추진 계획

인사발령 및 국정감사 등 특정기간 동안 모바일오피스 사용자 급증시 원활한 서비스 운영을 위하여, 부하테스트를 수행함으로써 쿼리문 튜닝 및 서비스 최적화 등 성능개선을 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

❍ 모바일오피스 성능개선 사업 계획(정보시스템담당관-2770, 2017.2.28.)

추진기간 : 2017년 6월 ~ 7월

***********

*************

*************************************

****************************

******************************************

*****

*********************************

****************************************

**************************************************************************

추진방안

❍ 현재 운영환경에서의 성능 분석

- 현재 운영환경에서 최대 동시접속자 및 최대 동시사용자 파악

❍ 성능 부하테스트 실시하여 서비스 지연현상 원인 분석

❍ 부하원인 분석에 따른 기능개선 수행 및 향후 개선방안 수립

- 즉시 조치 가능한 경우 기능개선 수행

- 쿼리 튜닝 및 환경 파라미터 튜닝으로 서비스 최적화 제고

- 상시 원활한 서비스를 위한 향후 개선방안 수립(클라우드 활용방안 등)

Ⅱ		세부 추진계획

성능테스트 단말기 : 모바일오피스 개발용 PC

성능테스트 툴 : Jmeter, Jmeter Plugin

성능테스트 시나리오

*************************************************************************************************

**

❍ 500명의 가상유저를 발생하여 동시에 로그인할 경우 서비스 분석

❍ 500명의 가상유저가 동일한 첨부파일 보기 수행 시 서비스 분석

❍ 동시 사용자 500명 기준으로 각 콘텐츠별 서비스 부하여부 분석

※ 세부내용은 붙임 성능테스트 작업계획서 참조

Ⅲ		추 진 일 정

세부 작업일정

구 분	날짜	작업내용	비 고
요구사항 정의	6.1~6.7	현재 운영 로그 분석하여 요구사항 정의	성능테스트 요구사항 정의서 작성
시나리오 및 스크립트 작성	6.8~6.10	요구사항 정의에 따른 시나리오 작성	Jmeter 설치 및 스크립트 작성
개선 전 성능테스트(1차)	6.14(수) 19:00~21:00	시나리오에 따른 1차 성능테스트 실시	성능테스트 결과보고서 작성
튜닝 및 소스 보완 등 성능개선작업	6.15~6.21	성능테스트 결과 분석 및 성능 개선작업 실시
개선 후 성능테스트(2차)	6.22(목) 19:00~21:00	시나리오에 따른 2차 성능테스트 실시	성능테스트 결과보고서 작성
*********** ********	*******	*********** ************	***** ********
********* *********	*********	************ ******
********** ********	*******	*********** ************	***** ********
********* **********	*********	************ ******
개선 후 성능 테스트(3차)	7.27(목) 19:00~21:00	시나리오에 따른 3차 성능테스트 실시	성능테스트 결과보고서 작성

※ 추진일정은 2017년 하반기 인사일정 및 담당자간 협의에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ		기 대 효 과

시스템 성능개선으로 운영환경 및 서비스 최적화 제고

응답시간 향상을 통한 업무 효율성 및 신뢰도 제고

Ⅴ		행 정 사 항

모바일오피스 연계시스템 모니터링 지원

❍ 행정포털 시스템 : 정보시스템담당관

❍ 언론보도 시스템(신문보도 스크랩, 연합뉴스, 인터넷뉴스) : 언론담당관

모바일오피스 서버 모니터링 지원

❍ 모바일오피스 중계서버 및 DB서버 : 데이터센터 정보자원운영과

❍ 모바일오피스 웹서버 : 데이터센터 인터넷통신과

성능테스트 단말기에서의 부하발생 접속 허용

❍ 접속허용 지원 : 데이터센터 인터넷통신과

********************************************

붙 임 : 성능테스트 작업계획서 1부.  끝.