문서번호	세무과-13797
결재일자	2017.6.14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	06/14 임출빈
협조

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월    간    보    고(5월)

2017. 6

재 무 국

(세무과)

「2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (5월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 5월중 주요 추진과업 내용과 6월중 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘17. 1. 4 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,310백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 정기분 부과 검증관리․자동차세 부과업무․체납차량 번호판 영치업무 개선

- 제증명 발급관리․주민세관리․세입현계 결산관리 및 징수보고 개선

- 주민등록번호 변경정보 조회기능 및 과세자료 정비기능 개선 등

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `17. 6. 7.(수) 14:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `17년 5월 과업진행 추진실적 및 6월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분	총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
		누적합계	5월 완료		합계	진행	지연
신규	28	6	2		7	5	2	15
보완	48	29	5		3	3	0	16
총계	76	35	7		10	8	2	31
유지관리(운영 지원 등)		906	244		0	0	0	0
5월 7개과업 완료
				-SFR-014(신고분)신고분 부과자료 전송개선 -SFR-028(기타마일리지)에코마일리지 차감처리 -MAR-004(등록면허세)결정(경정)청구관리 보완 -MAR-006(등록면허세)등록면허세(등록)일괄출력기능 보완 -MAR-018(재산세 토지)재산세 토지분 시뮬레이션 기능보완 -MAR-019(세정연감)결산실적 일괄등록 후 내부검증 기능 추가 -MAR-020(세정연감)부과실적 관리시 구청별 조회 선택기능 추가
6월 7개과업 진행예정
-SFR-004(취득세)기한후 신고 기능개선 -SFR-005(주민세)종업원분 관리개선 프로그램 -SFR-007(주민세)주민세(균등분)부과기초자료 연계개선				-SFR-009(구제제도)구제제도 기능개선 -SFR-020(담배소비세)납세담보발급 전자신청 기능 개선 -MAR-001(부동산취득세)유형별과세자료조회 보완 -MAR-034(38세무)TO_DO LIST 조회 개선

따로붙임 1. 2017년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(5월)  1부.

2. 전체 과업에 대한 추진현황  1부.

3. 월간 업무현황 보고서  1부.

4. WBS  1부.

5. 투입인력 임금지급 확인서  1부.