급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		시설관리팀장	시설관리과장			결재
정성오		권승계	06/15 김기상
협 조

명에 의하여 「사당1동외 14개동 상수도공사」 감독업무 수행 중 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2017.  6.   .

직 지방시설주사보 성명: 정성오

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	*****************	********	2017.06.07 ~ 2017.06.16	신설-41	D=20~4mm, L=4.5m	㈜한우리씨앤아이
2	*********	***	2017.06.07 ~ 2017.06.16	신설-42	D=20mm, L=2.5m	㈜한우리씨앤아이
3	***********	***	2017.06.07 ~ 2017.06.16	신설-43	D=30mm, L=2.0m	㈜한우리씨앤아이
3	********	********	2017.06.09 ~ 2017.06.19	신설-45	D=40mm, L=3.0m	㈜한우리씨앤아이

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 수요가의 현장 여건(내부공사 미비 및 자재적치)으로 인한 공사기한 연기

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비고
1	*****************	2017.06.07 ~ 2017.06.16	2017.06.07 ~ 2017.06.30	급수공사 연기 시행
2	*********	2017.06.07 ~ 2017.06.16	2017.06.07 ~ 2017.06.26	급수공사 연기 시행
3	***********	2017.06.07 ~ 2017.06.16	2017.06.07 ~ 2017.06.30	급수공사 연기 시행
3	********	2017.06.09 ~ 2017.06.19	2017.06.09 ~ 2017.06.30	급수공사 연기 시행

붙임 : 급수공사 연기원 각 1부.  끝.