문서번호	기전과-6440
결재일자	2017.6.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
안광순	06/15 양영민

『 2017년도 한강교량 경관조명 유지보수공사 』

설 계  변 경  보 고

2017. 6.

『 2017년도 한강교량 경관조명 유지보수공사 』

설 계  변 경  보 고

『 2 017년도 한강교량 경관조명 유지보수공사』물량 증감에 대하여 아래와 같이 설계 변경 시행코자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2017년 한강교량 경관조명 유지보수공사

○ 도 급 자: **************

○ 공사금액: *********************

○ 공사기간: 2017.4.17. ~ 2017.12.31.

○ 공사규모: 한강교량 경관조명 부점등 보수 및 등기구 수선1식

□ 설계 변경

○ 설계변경 사유 : 물량 증감

일위집계표	품명	규격	수량
			당초	변경후
번호 98	투광기세척	외부	1	50
번호 99	투광기세척	외부,장비사용	10	51
번호 100	투광기세척	내,외부	1	51
번호 101	투광기세척	내,외부,장비사용	1	51
번호 102	CCL.LED세척	외부	1	51
번호 103	CCL.LED세척	외부,장비사용	1	51
번호 106	경관조명안정기교체	400W 이하	5	3
번호 107	경관조명안정기교체	400W이하 장비사용	4	3
번호 108	경관조명램프교체	투광기,CCL	4	11
번호 109	경관조명램프교체	장비사용 투광기,CCL	1	4
번호 110	투광기교체	400W 이하	1	2
번호 111	투광기 교체	400W이하 장비사용	5	2
번호 113	CCL,LEDBAR교체	CCL ,LEDBAR	1	2
번호 114	CCL ,LEDBAR 교체	장비사용	1	1
번호 116	주간순찰		1	3
번호 117	야간순찰	시설물전체	1	2
번호 131	바지선 사용	예인선 504HR,부선170TON.	1	2
※ 이 외 물량은 삭제

○ 설계변경(총괄)금액 : 변동없음

○ 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리,

기전시설물관리(도시개발특별회계),

도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비

□ 보고자 의견(조치 계획)

○ 상기 공사의 물량 증․감을 설계 변경하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임:  설계변경내역서 1부.  끝.