문서번호	시설과-3560
결재일자	2017.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김기수	이무림	김재균	06/15 이춘희
협 조
	재무팀장		정동철
	주무관		전정아

『남산공원 전망데크 정비시행』

설계변경 검토보고

2017. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남산공원 전망데크 정비시행』

설계변경 검토보고

『남산공원 전망데크 정비시행』 추진과 관련하여 시민들의 이용 편의를 위한 전망데크 확대조성 및 공사 품질향상을 위하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 남산공원 전망데크 정비시행

도급금액 : 금193,771,110원(금일억구천삼백칠십칠만일천일백일십원)

공사기간 : 2016. 12. 21. ~ 2017. 9. 30.

도 급 자 : 세영건설 주식회사 대표 이하영

주요 설계변경 내용

구 분	변 경 내 용	비 고
식재 및 시설물 정비	▶ 전망데크 확대조성 - 전망데크확대 : L30m×W8m → L52m×W6m ▶ 수목 정비물량 조정 - 위험수목 제거물량 조정 : 4주 → 15주 - 조팝나무 식재 : 0주 → 340주 ▶ 전망데크 기둥 목재가림막 설치 - 기둥목재가림막 : 0m → 165m ▶ 앉음벽 설치반영 - 앉음벽(H400) : 0개소 → 8개소 ▶ 사면 안정화를 위한 축대목 설치 - 축대목(H600) : 0경간 → 22경간	전망데크 확대조성, 편의시설확충 및 경관향상

관급자재 변경

구 분	변 경 내 용	비 고
관급자재	▶ 목재판재, 안전난간 관급자재 물량 조정 반영(안전 및 내구성 향상) - 목재판재 : 389㎡(모말라) → 575㎡(멀바우) - 안전난간(H1200) : 0m → 76m	안전시설 확충 및 데크 내구성 향상

변경금액 (증145,000,000원)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	176,155,555	265,119,000	증88,963,445
	부가가치세	17,615,555	26,511,900	증8,896,345
	합 계	193,771,110	291,630,900	증97,859,790
관급자재비		24,248,200	71,388,410	증47,140,210
총공사비		218,019,310	363,019,310	증145,000,000

예산과목

: 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원유지관리 및 이용활성화, 헬로우

남산프로젝트, 시설비(401-01)

검토의견

서울타워 일대는 시민을 비롯하여 외국 관광객이 주말은 물론 평일에도 많이 이용하는 곳으로 남산공원 전망광장의 전망공간 확대가 절실한 곳으로,

일부 예산 미확보로 단계적으로 정비하고자 하였으나 추가예산이 확보됨에 따라

추가 확보된 예산 범위내에서 설계변경하여 구조안전 검토후 안전하게 시행하여 시민들에게 편리한 전망공간을 제공하고자 함.

붙임  1. 변경내역서, 도면, 구조검토확인원 각1부.

2. 계약금액조정 제비율 검증확인서 1부.  끝.