문서번호	동북권사업단-5939
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서울아레나팀장	동북권사업반장		동북권사업단장
배장우	김동철	한병준		06/16 김승원
협 조

< 창동 일대 문화예술거점 조성방안 수립 >

용역 준공기한 연기 보고

2017. 6.

동북권사업단

(동북권사업반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

< 창동 일대 문화예술거점 조성방안 수립 >

용역 준공기한 연기 보고

현재 추진중인『창동 일대 문화예술거점 조성방안 수립 용역』관련 도시재생활성화 계획의 창업 및 문화산업단지 진행 내용에 따른 세부적인 검토․협의와 기타 용역 과업의 마무리 등 수행을 위해 추가 시일이 소요되어 아래와 같이 용역 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 창동 일대 문화예술거점 조성방안 수립 용역

○ 용역기간 : 2016. 08. 18. ~ 2017. 06. 18.

○ 용 역 사 : ㈜커런트코리아 외 2개사 대표자 박해진

○ 계약금액 : 금일억팔천팔백만원정(￦188,000,000-)

○ 과업 주요내용

- 문화예술(음악)산업 거점 조성방안 마련

- 대중음악관 조성 관련, 대중음악교육기관 설립 추진 방안

- 기업⋅기관 유치, 거버넌스 체계 구축 방안 마련

□ 그간 추진경위

○ `16. 08. 18. : 용역계약 및 착수보고

○ `17. 12. 22. : 추진사항 중간보고

○ `17. 02. 09. : 추진사항 중간보고

○ `17. 03. 10. : 추진사항 중간보고(3차, 본부장)

○ `17. 03. 31. : 전문가 자문 및 보고회의(4차, 단장)

○ `17.  4 ~ 5  : 문화･예술･산업 관련 기업, 기관, 학교 인터뷰

○ `17. 06. 14. : 추진사항 보고 및 자문회의

□ 변경사유 (귀책사유 : 서울시)

○ 용역 준공기한 연기 사유

- ｢창동 일대 문화예술거점 조성방안 수립 용역｣ 관련 도시재생활성화 계획의 창업 및 문화산업단지 진행 내용에 따른 세부적인 검토․협의와 기타 용역 과업의 마무리 등 수행을 위해 추가 시일이 소요되어 과업 절대기간 부족으로 용역 준공기한 연기 필요

□ 변경내용

○ 계약금액 : 변경없음

○ 준공기한 : (당초)  ‘17. 06. 18. → (변경) ‘17. 10. 17.

연번	구분	당초/변경	내용	비고
1	용역계약 (기간)변경	당초	‘16.08.18. ~ ‘17.06.18.
		변경	‘16.08.18. ~ ‘17.10.17.

○ 지체상금 : 미부과

□ 용역비 집행 현황

(단위 천원)

‘16.예산	계약금액	기 지출액	사고이월액	지출예정액	비 고
197,000	188,000	94,000	94,000	94,000

□ 향후 일정

○ ‘17.  6.	: 용역 준공기한 연기 및 변경계약 체결

○ ‘17.  7~8 : 과업 내용 보완 및 추진, 기업․기관․학교 설명회

○ ‘17.  9.	: 용역 마무리 및 최종 보고

○ ‘17. 10.	: 용역 준공

붙임 : 1. 준공 연기 요청 공문 1부

2. 합의서 1부

3. 예정공정표 변경전․후 1부. 끝.