문서번호	급수운영과-11161
결재일자	2017.6.19.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		06/19 유용일
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
공사 실정보고서 검토보고 (압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사)

2017. 06.

강남수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고서 검토 보고

『압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

가. 공 사 명 : 압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 04. 10. ~ 2017. 10. 06.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : D=30~300mm, L=2,150m

마. 도 급 자 : **************

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 급수운영과

실정보고 현황

가. 관련대호 : 공사감독2처-5130(2017.06.14.)호

나. 보고내용

6구간(신사동 594-4, 594-6번지) 분기 연결부

- 6구간 중 신사동 594-4, 594-6번지 분기연결부에 신설 밸브(D150, 2개소)를 시공하여 기존관(D150, 2개소)을 연결하도록 설계되어 있으나 횡단굴착 결과 기존관 연결부 구간의 상수도관(D150)이 개량된 관으로 확인.

▶ 해당구간의 기존관(D150) 확인 결과 개량된 관으로서 연결부의 밸브 및 노후관 교체가 불필요하다고 사료되며 이로인해 설계상의 분기부분에 필요한 자재 및 제수밸브실 2개소(D150)를 제외하는 것이 타당하다고 판단됨. [개략 공사비 : 감)3,000천원]

위치도 및 현장사진

***
****	****

실정보고 검토의견

6구간(신사동 594-4번지, 594-6번지) 분기부 연결건

- 해당구간 기존관(D150)이 이미 개량되어 있어 연결부의 밸브(D150, 2개소)는 신규 설치하지 않고 제외하는 것이 타당함.

조치 계획

상기 검토의견과 같이 6구간(신사동 594-4번지, 594-6번지) 분기부 연결건에 대하여 우선 시행하고, 향후 설계변경시에 증감분에 대하여 적용 시행토록 서울특별시시설관리공단에 회신하고자 함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.