상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(1차, 2017년 송파구관내상수도시설물)

우리사업소에서 시행하는 아래 공사의 설계변경 심의회를 개최하고 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 송파구관내 상수도시설물정비공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : *****************

다. 공사기간 : 2017.05.12. ~ 2018.05.31.

라. 변경사유 : 신공종 및 계약물량 증·감사항 발생

마. 변경내역

(단위: 원)

구 분	금 액		비 고
	당 초	변 경
도 급 비	***********	***********	금액변동없이 신공종 발생 및 계약물량 증·감에 따른 설계변경
1차 금액	***********	***********
2차 금액	***********	***********

붙  임  1. 설계변경 사전심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	임인택		급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	06/20 신대현
협조자	주무관	박홍선		주무관	최명삼
시행	급수운영과-11091	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5160	/전송	02)3146-5189	/		/	부분공개(5)