상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계 변경 시행(2017년 천호1동 외 17개동 상수도공사-1차)

1. 우리 사업소에서 시행 중인 『2017년 천호1동 외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여 설계 변경 심의회를 개최하고 다음과 같이 설계 변경을 시행하고자 합니다.

가. 공사명: 2017년 천호1동 외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사 개요: D=15~300mm, L=2,334m

다. 공사 기간: 2017. 02. 07.~2018. 06. 30.

라. 계약자: 수호건설 대표 문병순

마. 변경 사유: 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

바. 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
총계약금액	***********	***********	계약금액 및 차수별 금액변경 없음
1차금액	***********	***********
2차금액	***********	***********

붙임 : 1. 설계 변경 심의 의견서 1부.

2. 설계 변경 내역서 1부.  끝.

주무관	양봉우		주무관	송종범		시설관리과장	김태형		강동수도사업소장	06/20 신대현
협조자
시행	시설관리과-11588	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(7)