투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	건설사업관리용역 변경계약 의뢰(마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사)

우리 본부가 사업시행 중인「마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행)」변경계약(총차 및 2차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

나. 용역기간 : 2015.12.22 ~ 2017.07.31. (2차 : 2016.05.31 ~ 2017.07.31)

다. 계약금액 : 2,030,000,000원 (2차 :1,630,000,000원 )

라. 계 약 자 : ㈜무영씨엠건축사사무소외 1개사

마. 계약변경 내용

구 분		변경 전	변경 후	비 고
용역기간	총차	2015.12.22~2017.06.21	2015.12.22~2017.07.31	-
	2차	2016.05.31~2017.06.21	2016.05.31~2017.07.31	-
계약금액	총차	1,982,566,000원	2,030,000,000원	증 47,434,000원
	2차	1,582,566,000원	1,630,000,000원	증 47,434,000원

바. 예산과목 : 공원조성과, 생활권주변공원확충, 도심공원확충, 마포석유비축기지 재생

및 공원화, 시설비 및 부대비, 감리비

사. 변경사유 : 공사 준공일 변경에 따른 건설사업관리용역 기간(총차 및 2차) 연장

붙임 : 1. 변경계약 검토보고(방침) 1부.

2. 변경계약 요청공문(건설사업관리단) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정재철		건축총괄과장	박범규		건축부장	06/20 김진용
협조자	지방시설사무관대우	차무흥
시행	건축부-10440	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2604	/전송	02-3708-2659	/	arc44136@seoul.go.kr	/	부분공개(5)