문서번호	방재시설부-10581
결재일자	2017.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	06/21 남궁용
협조

『새문안로 중앙버스전용차로 설치공사』

조경공사 수량변경 실정보고사항검토 보고

2017. 06

도시기반시설본부

[방재시설부]

『새문안로 중앙버스전용차로 설치공사』

조경공사 수량변경 실정보고사항검토 보고

『새문안로 중앙버스전용차로 설치공사』중 조경공사 수량 변경으로 인한 비용변경에 대한 실정보고 사항을 검토 후 보고 드림.

- 관련근거 : 새문안감 제2017-129호(2017.6.20.)호

공사개요

□ 공 사 명 : 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사

□ 공사위치 : 서대문역~세종대로 사거리(총연장 1.2㎞)

□ 공사규모

∙ L=1.2㎞, 차로수 7~8차로(BRT 전용차로 2차로 포함)

∙ 버스정류소 왕복4개소(도심방향2개소, 외곽방향 2개소)

□ 공사기간 : 2016.11.30.~2017.06.30.

□ 공 사 비 : ***********************

□ 시 공 사 : 국성산업개발주식회사

□ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링건축사사무소(60%),(주)삼안(40%)

감리단 검토사항

□ 검토사유

∙ 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사 중 조경공사 수량변경 비용반영 실정보고가 접수되어 적정성 검토

□ 검토내용

1) 시티은행 앞 은행나무 신식수량 삭제.

- ************************************************************************************

2) S타워(금호아시아나 본사빌딩) 앞 버스정류소 띠녹지 관목 이식.

- *****************************************************************

3) 정동사거리 교통섬 회양목 신식 반영.

- ******************************************************

4) 조경 식재 위치도(해당구간)

□ 수량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
가로수 신식
은행나무	**********	*	**	**	***	*****
회양목	***********	*	*	***	***	*********
가로수 이식
관목이식	**********	*	*	***	***	*****
관목이식	**********	*	*	**	**	*****

□ 공사비 검토

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
조경공	*******	*******	********
직 접 공 사 비	*******	*******	********
간 접 공 사 비	******	*******	********
폐 기 물 처 리 비	***	***	*
유전자검사수수료	*	***	***
공 급 가 액	*******	*******	********
부 가 가 치 세	******	******	********
도 급 액	*******	*******	********
총 공 사 비	*******	*******	********

□ 단가적용

∙ 추가 설계반영에 따른 낙찰율(*******)적용

책임건설사업관리기술자 의견

□ 상기 검토 내용과 같이 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사중 시티은행앞  은행나무 신식이 지장물(한전관로 및 통시관로)과다로 인한여 식재가 불가능하여 삭제하고, 교통운영과 협조요청 사항인 S타워 앞 버스승강장 띠녹지의 관목 이설을 반영하여 민원사항을 해결하고, 정동사거리 교통섬 관목식재를 반영 함에 적정하다 사료되며, 추후 설계변경시 반영함이 타당하다 판단 됨.

검토결과

□ 본 실정보고건은 『새문안로 중앙버스전용차로 설치공사」조경공종 시행중 감리단 검토내용과 같이 불가피하게 식재사항을 일부 변경 하면서 낙찰률(86.747%)을 적용한다는 책임건설사업관리기술자의견이 타당하고,   설계대가 기준이 적합하므로 승인하고자 하며 추후 설계변경시 반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 합니다.

붙 임 : 새문안감 제2017-129호(2017.6.20.)호 문서1부. 끝.