문서번호	토목부-12785
결재일자	2017.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	06/21 代이동훈
협조

버스정차대 이설비용 반영 검토보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

2017. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

버스정차대 이설비용 반영 검토 보고

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

교통운영과등 협의결과에 따라 버스정차대를 이전하고 관련비용을  반영코자 검토보고 드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사

○ 위    치 : 서대문구 미동초교앞~세종대로 사거리

○ 규    모 : 전체 1,200m, 버스승강장 4개소 설치

○ 기    간 : 2016.11.30. ~ 2017. 6.30.

○ 사 업 비 : 3,600백만원(도급비:2,194백만원)

○ 시 공 사 : 국성산업개발(주), 감 리 사 : 제일엔지니어링외 1

○ 공 정 율 : 99%

실정보고

○ 중앙차로내 버스정차대 신설로 기존 버스승차대 이전필요

- 교통혼잡 최소화에 따른 경찰청 및 교통운영과 협의결과에 따라 기설치된 버스 정차대 3개소 (ID : 01-121, 01-124, 01-250) 위치조정 및 비용 반영 필요.

○ 위치도

○ 현황사진

01-121 금호아시아나본관앞	01-124 한국씨티은행앞	01-250 흥국생명빌딩앞

○ 물량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
5. 부 대 공
버스정차대 이설		식	-	1	1

○ 사업비 검토                                           (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
5. 부 대 공	-	5,518	5,518
직 접 공 사 비	-	5,518	5,518
간 접 공 사 비	-	981	981
공 급 가 액	-	6,500	6,500
부 가 가 치 세	-	650	650
도 급 액	-	7,150	7,150
총 공 사 비	-	7,150	7,150

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(93.374%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 강제협의율 적용. (86.747+100)/2)=93.374%)

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

변경내역서 1부.   끝.