문서번호	시설과-3556
결재일자	2017.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	06/21 공헌구
협 조

『2017년 기계시설물 유지보수공사(연간단가)』 하자담보책임기간 조정 보고

2017.06

서울대공원

(시설과)

『2017년 기계시설물 유지보수공사(연간단가)』

하자담보책임기간 조정 보고

대공원에서 시행중에 있는 2017년 기계시설물 유지보수공사(연간단가)의「공사의 공종별 담보책임의 존속기간」이 기준과 다르게 정해져 계약이행 중에 있으므로  하자담보기간을 기준에 맞게 변경 조정하고자 함.

□ 계약 현황

❍ 공 사 명 : 2017년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 계 약 자 : 엠에스건설산업(주) 대표 : 송완동

❍ 계약금액 : 253,137,970원

❍ 계약기간 : 2017.02.13.~2017.12.31까지

❍ 하자담보책임기간 및 요율 : 준공검사일로부터 1년, 3/100

□ 법적 근거

❍ 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제13장제10절제1호다목

- 시행규칙 제68조 관련 별표1에 정한기간과 다르게 정하여 계약이행 중인 경우에는 그 시행규칙에서 정한대로 계약서의 하자담보책임기간을 조정해야 한다

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 별표1

- 공사의 공종별 담보책임의 존속기간(제68조 관련)

급배수, 공동구, 지하저수조, 냉난방, 환기, 공기조화기, 자동제어 가스 또는 배연설비 : 2년

□ 계약변경 내용

❍ 하자담보책임기간 : 1년 ⇒ 2년 변경

□ 행정 사항

❍ 하자담보책임기간 변경계약 요청(시설과 ⇒ 총무과)

※ 2017년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(제1회) 계약 요청시 포함

붙임. 합의각서 1부.  끝.