문서번호	도로보수과-5979
결재일자	2017.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최병수	이석재	06/21 신응수

『2017년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역-북부』 동공 원인조사현장 검토 보고

2017.  6.

북부도로사업소

도로보수과

동공 원인조사현장 검토 보고

- 2017년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역 -북부

우리사업소에서 시행중에 있는『2017년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역』과 관련하여 동공 원인조사를 위한 굴착 과정에서 발생된 폐아스콘 덩어리에 대한 처리검토 보고임.

관련 근거

○ 경동 북부 제2017-17호(2017.06.21) : 폐아스콘 덩어리 발생보고

용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역 - 북부

○ 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 9,000톤

○ 용역기간 : 2017.03.16. ~ 2017.12.31

○ 용역금액 : 90,523,000원

○ 도 급 자 : ㈜하경엘씨  대표 곽봉기

현황 보고

○ 서울시 도로관리과에서 시행하고 있는『2017년 도로함몰 예방사업 추진계획』에 따른 동공탐사용역과 관련하여 동공탐사장비(GPR)에 의해 발견된 지점에 대하여 동공 원인조사를 위한 포장도로 굴착시 폐아스콘 덩어리 발생

- 폐아스콘 덩어리 발생량 : 약 1,060톤(추정물량)

◦ 수  량 : 약 200개소(추정수량) × 개소당 약 5.3톤 = 1,060톤

- 개소당 5.3톤 = (가로3m×세로3m×두께(평균) 0.25m×2.35톤)

◦ 2017년 3단계로 용역진행중에 있으며 1단계 조사결과 72개소

(하반기, 2단계 및 3단계 조사결과 통보될 예정)

○ 계약된 폐아스콘 처리업체로부터 설계변경 요청 문서 접수

◦ 하경 2017-27호(2017.06.15) : 평삭재의 경우는 무대(무단가)로 처리가 가능하지만, 아스콘 덩어리의 경우 재생업체에 반입이 불가하므로 설계변경 검토 요청

※ 폐아스콘 덩어리를 재활용하기 위해서는 추가적인 파쇄비용 소요

보고 내용

○ 폐아스콘 덩어리를 순환골재(재생아스콘)로 사용하기 위해서는 폐아스콘 처리업체에서 중장비(백호우)를 사용하여 파쇄해야 하므로 중장비 사용에 따른 추가 비용이 발생되고 있어 소량의 경우 폐아스콘 처리업체에서 긴급복구공사 작업여건을 이해하여 처리해주고 있지만,

○ 2017년의 경우에는 서울시 도로관리과에서 동공탐사장비(GPR)를 이용하여 지속적으로 동공을 탐사하고 있어 폐아스콘 덩어리 발생이 많을 것으로 예상되어 폐기물처리업체에서 무대(무단가)처리는 어려울것으로 사료됨.

○ 대책방안으로, 2017년 서부도로사업소에서 시행하고 있는 폐아스콘 덩어리 처리비용을 준용하여 폐기물처리

※ 설계(견적)단가 : 13,000원/톤

○ 예상 추가 처리비용 : 약 13,780천원

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 동공원인 조사를 원활하게 추진하기 위하여 폐아스콘 덩어리에 대한 폐기물처리비를 반영하여 설계변경코자 함.

별 첨 1. 감리단 실정보고 1부.

2. 설계변경요청 공문 1부.   끝.