문서번호	방재시설부-1365
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
송민영		박희천	04/09 박종웅
협조	열빛총괄과장		권오식
	주무관		조양호

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업(8차공사)」

예비준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

도시기반시설본부

(방재시설부)

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업(8차공사)」

예비 준공검사 시행 보고

본 공사 관련 준공기한이 도래하여 공사의 원활한 마무리를 위하여 건설기술관리법시행령 제67조(준공) 및 책임 감리현장 참여자 업무지침 제62조(예비준공검사)에 의거 예비 준공검사 시행에 대한 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 건설기술관리법시행령 제67조(준공), 책임 감리현장 참여자 업무지침 제62조(예비준공검사)

○ 한종(중랑) 제14-63호(2014.04.03) : 8차분 예비준공검사 요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 차장터5길 10(송정동 73 중랑물재생센터 내)

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 8차공사

○ 규    모 :  생물여과 질산화조, 초기우수처리시설

- 토목 : 생물여과 질산화조(L) T.O.P 슬라브, 초기우수처리시설 바닥 슬라브, 유입관로 관부설공 등 토목공사 1식

- 설비 : 생물여과 – 질산화 탈질조 설비 유입밸브, 생물여과 – 질산화 탈질조 설비 역세유출밸브, 역세배수조 유입밸브 등 기계공사 1식

- 건축 : 하수도 과학관 PIT 층

○ 공사기간 : 2013.6.29. ~ 2014.4.30

○ 도 급 비 : 12,700백만원(공정률 : 89%)

○ 시공사/감리사 : 주)GS건설 / 한국종합기술

Ⅲ		예비준공검사 시행 개요

○  일  시 : 2014. 04. 10(목) 14:00~

○  장  소 : 중랑물재생센터 고도처리공사 현장

○  참 여 자

- 본부 : 토목분야 업무담당(송민영, 조양호), 기계분야(이종근)

건축분야 별도시행

- 감리단 : 책임감리원, 상주감리원

○ 예비준공검사 내용

- 준공 기한 내 준공 가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 감리원 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의거 검사

- 검사 내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

ㆍ준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

ㆍ공사시공시의 현장 상주감리원의 비치된 제기록에 대한 검토

ㆍ지하 또는 기초 부분의 시공확인과 주요 시공과정을 촬영한 사진확인

ㆍ품질시험ㆍ검사 성과 총괄표 내용

ㆍ폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의  적정성 여부

ㆍ책임감리원이 제출한 품질시험 검사 검토서 내용

ㆍ제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황

ㆍ기타 검사자가 인정하는 사항

※ 검사자는 시공된 부분이 수중 지하구조물의 내부 또는 저부 등 시공후 매몰되어 사후 검사가 곤란한 부분과 주요 구조물에 중대한 피해를 주거나 대량의 파손 및 재시공 행위를 요하는 검사는 감리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

Ⅳ		향후계획

○ 예비 준공 검사후 보완 사항은 시공자에게 보완 지시하고 준공검사시 이를 확인할 수 있도록 감리회사 대표자에게 결과통보

○ 시공자는 예비준공 검사의 지적 사항 등을 완전히 보완한 후 책임 감리원의 확인을 받은 후 준공 검사원을 제출

붙임 책임감리원 예비준공검사 요청서 1부(별첨).    끝.