문서번호	토목부-13171
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	06/26 代이동훈
협조

하수도 설계비 반영 검토 보고

(여의도 지하벙커 개선공사)

2017. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

하수도 설계비 반영 검토보고

(여의도 지하벙커 개선공사)

여의도 지하벙커주변 하수관 이설 및 재설치에 대하여 설계비용을 반영하고자 검토 보고 드림.

1		공 사 현 황

○ 사 업 명 : 여의도 지하벙커 개선공사

○ 위    치 : 영등포구 여의도동 2-11

○ 규    모 : 지하1층 지상1층, 연면적 963㎡ (문화시설 전시장)

○ 기    간 : 2016.10.14. ~ 2017. 9.30.

○ 사 업 비 : 30억원(공사비 28억, 설계비 0.7억, 감리비 1.3억)

○ 시 공 사 : 두방종합건설(주), 감 리 사 : ㈜상엔지니어링건축사사무소

○ 공 정 율 : 25%, 벽체 콘크리트 타설중

2		실정보고내용

○ 여의도 지하벙커 주변에는 하수관로주변으로 한전고압, KT통신관로, 상수도, 지역난방관로가 매립되어있어 엘리베이터실을 설치하기위해서는 지장물들이 우선 이설되어야함.

○ 설계단계에서 영등포구와 미협의된 상태에서 용역준공된 하수시설물 설치계획에 대하여 기설계한 용역사로 하여금 수차례 보완요청 하였으나,    건축설계사임으로 하수도 전문업체가 직접 보완토록 요청함(실시설계시 하수도 설계비 미반영됨)

○ 시공사에서 설계사를 선정하여 하수관 설계를 보완하고 영등포구와 협의하여 향후 안전총괄과에서 장단기 하수도 기본계획이 결정되면 관련 도서(수리계산서, 내역서, 도면등)를 납품하는 조건으로 검토.

3		경 과 현 황

- 2017.01.13. : 지장물 조사결과 제출지시(토목부→시공사, 1차)

- 2017.03.13. : 하수관로 설계보완 협조요청(설계사→건축부)

(실시설계 업무가 가능한 전문업체가 설계진행해야 되는 업무로 보완이 어려움)

- 2017.03.20. : 하수도 설치계획 제출지시(토목부→시공사, 2차)

- 2017.03.22. : 하수도 설치계획 제출지시(토목부→시공사, 3차)

- 2017.06.22. : 노후하수관로 설계용역비 제출(시공사→건축부)

○ 위치도

○ 현황 사진

지장물 전경	신한금융앞 하수관 전경(D=800㎜)

3		하수시설물 설계비용검토

○ 하수시설물 설계비 반영 대상

구분	회사명	요청금액 (단위: 천원)	추진사항
하수	에이스톤엔지니어링	44,961	- 하수시설물 계획, 설계 및 검토 - 영등포구 협의하여 장, 단기안 마련 - 설계도면, 수량산출서, 내역서 수리계산서 작성

○ 관련규정에 따른 설계비 검토

1) 서울시 기준 설계요율 적용 (행정2부시장 방침 제10109호 `11.9.5)

※ 기본 및 실시설계 통합발주용역 설계요율표

공사비	분리발주 설계요율(%)		************
	기본설계	실시설계	기본설계 실시설계동시발주	기본설계없이 실시설계발주	직선보간법적용 요율(%)
5억원 이하	2.01	4.03	5.24	4.93	4.456
10억원 이하	1.77	3.55	4.61	4.35

2) 엔지니어링 사업대가 기준요율 (`14.10.13고시)

구분	공사비	실시설계	직선보간법적용 요율(%)
건설부문의 요율 [별표 1]	5억원이하	4.03	4.728
	10억원이하	3.55

○ 설계비 검토결과

요구금액(천윈) 공사비요율방식		검토결과 ************	비고
서울시 기준적용	엔지니어링 사업대가적용
44,961	47,681	- 추정공사비1,000,000,000으로 계상 - 행정2부시장 방침 제10109호 적용 - 직선보간법을 적용 4.456% 요율 반영 - 설계비 산출근거 - 순공사=1,0억원-1/10(부가세) 909,000,000원×4.456%= 40,505,040원	설계비검토
		- 총설계비 계산 및 낙찰율적용 40,505,040+369,000=40,873,636원 + 부가가치세 4,087,364원 = 44,961,000원×************** = 39,005,000원 *********************	낙찰율검토

5		검 토 결 과

○ 상기와 같이 검토한바 실시설계비에 대한 시공사의 요청 금액을 39,005천원(부가세포함)으로 조정 승인코자 하며, 향후 예산범위내에서 설계변경추진토록 건축부에 통보코자 함.

○ 하수도 공사비는 건축부에서 실제 공사한 내용을 토대로 설계 반영추진

붙 임 1. 설계내역서 1부,

2. 관련방침 (행정2부시장방침 제282호) 1부. 끝.