투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 통보(서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 기계공사 외)

1. 우리본부에서 시행하고 있는 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업』과 관련하여 기계설비 공사 외2건의 하도급 변경 사항을 아래와 같이 통보합니다.

가. 하도급 변경내용

하도급 공종	하도급 변경내용			비고
	당초	변경	증감
기계공사(구보공영)	7,767,134,100원	7,748,609,200원	감)20,524,900원	하도급금액 정산
철거공사(대성기공)	‘12.06.22～’14.02.28	‘12.06.22～’14.07.31	5개월 연장	공사기간 연장
탈취공사(대성기공)	1,765,500,000원	2,021,800,000원	증)256,300,000원	배관 추가공사 및 공사기간 연장
	‘12.03.30～’14.02.28	‘12.03.30～’14.07.31	4개월 연장

따로붙임 : 1. 하도급 변경계약 보고 1부.

2. 하도급 변경 대림공문 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이호기		환경설비과장	이달영		설비부장	04/09 박기형
협조자
시행	설비부-3820	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 서소문별관 2동 2층	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개