시의원 요구 자료 제출

시 행	주차계획과-8201
결재일자	2017.6.27.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		주차시설팀장	주차계획과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
금종융		전태호	오진완	이대현	06/27 代이대현
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 835번, 남재경 의원, 문화체육관광위원회)

따로붙임 :     시의원 요구자료 1부.  끝.

남재경 의원(문화체육관광위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 835번

1. 필운대로 지하주차장 사업 추진현황 및 향후계획

□ 추진배경

○ 필운대로 역사문화거리 조성과 관련 전신주 지중화사업 및 보행환경개선을 위해

기존 거주자우선 주차장이 축소되어 그 대안으로 지하주차장 건설 추진

□ 사업개획(자치구)

○ 위    치 : 종로구 필운대로 (사직동주민센터~청운효자동주민센터)

※ 역사․문화보행거리 조성 및 전선지중화(한전 시행)사업과 병행 추진

○ 사업기간 : ‘16.4~’19.7

○ 규    모 : 256면 (지하2~지상1층)

○ 추정사업비 : 약 400억 (1차 투자심사 266억원)

□ 추진경위

○ ‘15.7.  : 필운역사문화거리 조성 타당성조사 및 기본계획 (한옥조성과,구)

* 보행환경거리 조성으로 거주차우선주차장 일부 폐지(90면)로 주차불편 가중되니

대안으로 지하주차장 건설 필요 (주차장확보율 69.7%)

○ ‘15.8.  : 시 투자심사(재검토)

* 역사문화거리 조성사업과 연계성 검토 및 삭선되는 주차면수 대비 해당구간의

지하주차장 건설에 신중한 검토 필요

○ ‘15.11. : 시 투자심사(조건부)

* 적정 사업비를 재산정하여 기본설계 이후 실시설계전 2단계 심사 실시

○ ‘16.2~    : 주차장건설 반대 집단민원 제기 (장창기 외)

○ ‘16.5~’17.7 : 기본 및 실시설계 용역 (구)

○ ‘17.3.23.    : 주민설명회 개최 (구, 찬반의견 대립)

○ ‘17.3.31.    : 설계용역 일시 과업 중단 통보 (구→시, 중단사유 해소시까지)

□ 자치구 의견

○ 필운대로 지하주차장 건설사업에 대한 지역주민들의 찬,반 의견 대립으로 설계용역이 잠정 중단됨

○ 보도환경개선사업 및 지하주차장 건설사업에 대한 주민간담회 등을 통한 주민의견 수렴결과에 따라 조치하겠음

□ 향후계획

○ 주민 의견수렴 및 사업 시행자인 자치구의 입장이 정리되어 투자심사 요청 의뢰가 올 경우 검토 후 추진토록 하겠음

첨부   자치구 의견 1부

작성자	부 서 명	직 위	성 명
	주차계획과	주차시설팀장	전 태 호
	☎2133-2364	담당주무관	금 종 융
	작 성 일 : 2017.6.