투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	현대산업개발(주) 대표이사 박창민
(경유)
제목	지하철9호선 2단계 916공구 건설공사 공정만회 조치 요청

1. 귀사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 지하철9호선 2단계 916공구 전면책임감리 서지 916감 14-215호(2014.04.08.)와 관련입니다.

3. 귀사와 우리시간에 계약을 체결하여 시행중인 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사는 현재 8차 공사가 진행 중이나, 지하철9호선 2단계 916공구 전면책임감리사인 ㈜유신으로부터 공정지연과 관련한 문서가 접수되어 검토한바, 공사 현장에서 수시로 인력과 장비를 철수하는 등 공정을 원활하게 추진하지 못하여 공정율이 65.7%(기준일 2014.03.31.)로 매우 부진한 공정을 보이고 있습니다.

4. 또한 당초 준공기한을 4개월 이상 연장(2014.01.20.⇒2014.05.31.)하였음에도 기한 내 준공이 어려울 것으로 판단됩니다. 이로 인하여 지하철9호선 2단계 연내 개통을 위한 열차시험운전 등 전체 추진일정에 차질은 물론, 계약 불이행에 따른 지체상금 부과 등이 예상되는바, 조속히 본사 차원에서 담당임원이 현장상주근무를 하면서 특단의 공정만회 대책을 강구하여 적극적으로 공정이 정상화될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	성원배		토목2과장	권일순		도시철도토목부장	전결 04/09 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-4060	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7307	/	parandal@seoul.go.kr	/	대시민공개