문서번호	도로관리과-10533
결재일자	2017.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로관리팀장	도로관리과장
엄태용		최연우	06/27 배광환
협조
	주무관		최현

(2017년 1단계) 노면하부 동공탐사 구간조정 검토보고

2017. 6.

안전총괄본부

(도로관리과)

노면하부 동공탐사 구간조정 검토보고

도로함몰 사고를 사전에 예방하고자 추진하는 『2017년 노면하부 동공탐사용역(1단계)』 탐사구간이 현장여건(경전철 공사구간 및 교량구간 등)으로 조정이 불가피하여 검토 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(1단계)

○ 과업내용 : 서울시내 간선도로 880km, 동공 530개소

○ 용역기간 : 2017.4.26. ~ 10.22.

○ 용 역 비 : 1,488백만원

○ 계 약 자 : 셀파이엔씨(주)

○ 추진현황 : 1차 탐사 880km, 분석 355.6km, 발견동공 200개소

□ 현   황

○ 당초 계획한 탐사연장 구간은 교량구간과 및 경전철 공사구간이 존재하여 현장여건상 동공탐사에 어려움이 있음

□ 검토내용

○ 1차 탐사전 현장조사를 통하여 교량, 경전철 공사 구간 등 동공탐사가 필요없거나 동공발생 가능성이 낮은 지역을 탐사구간에서 제외

○ 탐사구간 제외로 축소된 물량에 대하여는 차량통행이 많고 지하매설물이 다수 분포하여 동공발생 가능성이 있는 구간으로 대체하여 탐사 추진

○ 탐사구간 조정계획

당 초				변 경
도로명	차로		탐사연장 (㎞)	도로명	차로		탐사연장 (㎞)
	수	연장 (㎞)			수	연장 (㎞)
계			58.8	계			59.0
강북구 삼양로	4	5	20	구로구 디지털로	6	1.1	6.6
구로구 도림천로	8	1.8	14.4	구로구 구로중앙로	6	0.6	3.6
관악구 관천로	6	0.9	5.4	구로구 구로동로	4	1.8	7.2
관악구 과천대로	10	1.9	19.0	영등포구 디지털로	4	1.4	5.6
				동대문구 답십리로	5	3.6	18
				강남구 개포로	4	4.5	18

□ 조치의견

○ 상기 탐사구간 조정계획과 같이 동공탐사 구간을 변경 시행코자 함.

첨부 : 탐사구간 현장조사 결과 실정보고 1부.   끝.