투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	용역준공기한 연기의뢰(서울창포원 공원환경개선 실시설계용역)

우리사업소에서 시행중인 『서울창포원 공원환경개선 실시설계용역』의 용역기간연장을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울창포원 공원환경개선 실시설계용역

나. 도 급 액 : 금29,996,000원

다. 도 급 자 : ㈜ 송림원 대표 임상규

라. 준공기한

- 당  초 : 2014.02.12. ~ 2014. 04. 12.

- 변  경 : 2014.02.12. ~ 2014. 04. 18.

붙임 : 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	녹지관리과장
주무관	김대수		주무관	진동엽		녹지관리과장	04/09 최병언
협조자
시행	녹지관리과-3377	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5949	/		/	대시민공개