문서번호	급수운영과-11880
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김병주	06/28 유용일
협 조

정산금액 변경(감액) 보고(2016년 2차 개포1동외 6개동 상수도공사)
	「2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사」 정산(1,2차) 금액 변경(감액) 보고

2017. 06.

강남수도사업소

(급수운영과)

“2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사”

정산(1,2차)금액 변경(감액) 보고

2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사 장기계속단가계약에 대한 1,2차 정산사항에 대한 금액 변경(감액) 보고임.

▣ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 2차 개포1동외 14개동 상수도공사

❍ 공사개요 : D=20~300mm, L=1,795m

❍ 공사기간 : 2016. 11. 4. ~ 2017. 6. 30.

❍ 도 급 비 : 601,232,120원

❍ 도 급 자 : (주)광진공영 대표 이덕희

▣ 예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

❍ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 소방재난능력의 향상으로 안전적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계. 소방용수시설 보수, 시설비

❍ 소방재난능력의 향상으로 안전적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계. 소방용수시설 설치, 시설비

▣ 정산(1,2차) 금액 변경(감액) 현황

❍ 1차 정산 조정 : 감)3,894,000원(기정산 금액: 171,094,000원)

- 토    공: 아스팔트포장절단공(야간)외 7개 공종

- 부 설 공: 주철직관 부설공 300mm(야간)외 21개 공종

- 구조물공: 원형밸브실 설치공(기초재생PE) 100mm(야간)외 5개 공종

❍ 2차 정산 조정 : 감)3,413,000원(기정산 금액: 280,203,000원)

- 토    공: 아스팔트포장절단공(야간)외 7개 공종

- 부 설 공: 주름마디 스텐관 부설공 20mm(야간)외 25개 공종

- 구조물공: 원형밸브실 설치공(기초재생PE) 100mm(야간)외 3개 공종

▣ 정산(1,2차) 금액 변경(감액) 사유

❍ 설계변경(3차,최종)시 시공물량 및 공종 검토시 할증 적용 착오에 따른 정산

금액 변경(감액) 사항임.

- 야간공종 주택가 할증(노무비 15%) 제외

▣ 정산(1,2차) 금액 변경(감액) 내역

구 분	당 초(기정산)	변 경(조정분)	비 고(증감)
1차 정산	171,094,000	167,200,000	감) 3,894,000
2차 정산	280,203,000	276,790,000	감) 3,413,000
계	451,297,000	443,990,000	감) 7,307,000

▣ 행정사항

❍ 3차 정산시 지출금액 감액후 준공처리

❍ 3차 정산금액 지출 협조요청 - 행정지원과

붙임: 정산조정내역서 1부. 끝.