보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	04/09 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-7661

광진구상수도공사 감독업무 수행중 ########### 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04. 09.

보고자 : #######################

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 광진구 상수도공사(2차) 연간단가

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	#############	###	2014.03.26.~04.09.	검침장애-2

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	#############	###	수요가 요청에 의한 일정 협의	2014.04.25	###

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 수요가 요청에 의한 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	#############	###	2014.03.26.~04.09.	2014.03.26.~2014.04.25.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.