문서번호	정보통신보안담당관-12672
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관
임시홍	代이정현	06/28 代이방우

- 노후 Access SW 교체 -

정보통신장비 납품결과 보고

2017. 6.

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

- 노후 Access SW 교체 -

정보통신장비 납품결과 보고

노후 정보통신장비(Access SW) 교체설치가 완료되어 물품내역, 및 설치상태, 제출도서 등 제반사항을 검수하고, 적정하게 납품된 것으로 확인하여 결과를 보고함.
코

Ⅰ				관 련 근 거

□ 액세스 스위치 구매 계약체결(재무과-23985/`17.5.11)

□ 정보통신장비(Access SW) 교체계획(정보통신보안담당관-11020/`17.6.5)

Ⅱ				사 업 개 요

□ 건    명 : 액세스 스위치 구매설치

□ 주요내역

기 종	설치장소	수 량	규 격
X440-G2-24p	신청사	4대	10/100/1000BASE-T 24port, PoE
	서소문청사	26대
	남산별관	11대
X440-G2-48p	서소문청사	7대	10/100/1000BASE-T 48port, PoE
	무교청사	2대

※ 상세 설치내역 : 붙임2 참조

□ 계약금액 : 138,012,600원

□ 계약업체 : 주식회사 스마트컴

□ 사업기간 : `17. 5.10 ~ 6.19

□ 추진일정

○ 사업수행계획 검토 및 승인       : `17. 5. 11 ~ 5. 23

○ 장비입고 및 검수                : `17. 5. 30 ~ 5. 31

○ 현장 점검 및 설치환경 조사         : `17. 5. 24 ~ 6.   5

○ 장비 교체, 동작확인 및 모니터링 : `17. 6.   6 ~ 6. 16

○ 운영상태 점검 및 납품검사       : `17. 6. 19 ~ 6. 23

Ⅲ				납품검사 시행		시

□ 계약이행 검수현황

구 분	검수내용	검수기간	검수자	결과
장비 점검	H/W 규격, 전원, FAN상태 등 장비 정보, 장비구성정보 확인, 통신상태 검사	`17. 6. 19	이정현 김헌성	정상
현장 점검	RACK 실장, 케이블 연결 및 라벨 확인, 시리얼번호, IP주소 등 설치내역 확인, 수거장비 비치 상태 확인	`17. 6. 20 ~ 6. 21	이정현 김헌성	정상
최종운영 점검	장비별 단위·통합시험 결과 확인 - 네트워크 연동시험 및 Log 동작 확인 - CPU, Memory, Process 등 확인	`17. 6. 22	이정현 김헌성	정상
납품도서 확인	납품내역서, 정품확인서, 장비 체크리스트 시험결과서, 사진첩, 카달로그 등	`17. 6. 23	이정현 김헌성	정상

※ 상세 검수결과 : 붙임3, 4 참조

□ 검수결과 : 과업지시서의 요구사항대로 적합하게 납품하고 설계도서 및 사업수행계획서의 전반공정을 준수하여 설치

□ 검 수 자 : 이정현(방송통신 7), 김헌성(방송통신 7)

□ 검수기간 : `17. 6. 19 ~ 6. 23

Ⅳ				향 후 계 획

□ 물품 검수조서에 의거 사업완료 조치(재무과)

□ 검수일로부터 1년간 하자보수

붙 임 : 1. 납품검사원 1부.

2. 장비 설치내역 1부.

3. 장비 검수 체크리스트 1부.

4. 장비 체크리스트 시험결과서 1부.

5. 장비 교체 사진첩(별도붙임) 1부.

6. 납품 완료보고서(별도붙임) 1부.  끝.