투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	"야행관 리모델링 공사(전기, 전기소방)" 설계변경에 따른 변경계약 의뢰

1. 시설과-3694(2017.6.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “야행관 리모델링 공사(전기, 전기소방)”와 관련하여 다음과 같이 설계변경에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 야행관 리모델링 공사(전기, 전기소방)

나. 공사기간 : 2017.1.25. ~ 12.15

다. 계 약 자 : ****************

라. 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감		비 고
계 약 금 액	총차	170,498,650	188,451,000	(증)	17,952,350
	금차	155,498,650	173,451,000	(증)	17,952,350

마. 설계변경 사유 : 신규공종 추가 반영, 물량증감 등

바. 예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전,

공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(야행관 시설개선)

붙임  1. 검토보고서 및 변경설계서 각 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	전성완		주무관	이춘한		시설과장	06/28 공헌구
협조자
시행	시설과-3772	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7432	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(7)