투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「시민의숲 CPTED 공원 조성공사」 최종 설계변경 시행

서울시시설관리공단 공사감독3처-9650(2014.4.7.)호, 공원운영과-(2014.3.26)호와 관련,『시민의숲 CPTED 공원 조성공사』에 대하여 아래와 같이 최종 설계변경시행하고자 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 시민의숲 CPTED공원 조성공사

2) 도 급 액 : 금255,343,000원

3) 공사기간 : 2014. 12. 23 ~ 2014. 4. 10

4) 도 급 자 : (주)지산랜드 대표 김지현

나. 공사비 변경내역

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		255,343,000	247,434,000	-7,909,000
도급비	공 급 가 액	232,130,000	224,940,000	-7,190,000
	부가가치세	23,213,000	22,494,000	-719,000
	계	255,343,000	247,434,000	-7,909,000

※ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 공원유지관리및이용활성화,시공원유지관리및보수정비(도시개발특별회계), 시설비

붙임 : 1. 시설관리공단 공문 1부.

2. 변경설계내역서 등(도면별도) 1부.  끝.

주무관	권지현		주무관	신재원		공원운영과장	이상용		동부공원녹지사업소장	04/09 이춘희
협조자	주무관	김인선		주무관	김덕수
시행	공원운영과-4855	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33	/
전화		/전송	02-2181-1139	/		/	대시민공개