문서번호	도시철도사업부-6817
결재일자	2017.6.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
왕태현		김형건	06/29 박동룡
협조

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구) - 2017년 7월 휴일 감리근무계획 승인 검토 보고

2017. 6.

도시철도사업부

『우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구)』

2017년 7월 휴일 감리근무계획 승인 검토 보고

우이～신설 도시철도 민간투자사업(3공구) 건설공사 관련 ‘17. 7월

휴일작업에 따른 감리 근무계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

휴일근무 승인 요청

○ 요청내용

- 우이신설 도시철도 건설공사(3공구) 책임건설사업관리기술자로부터 동일감(우이) 제17-302호(2017.6.29.)로 본선 및 정거장 구조물 공정 촉진을 위해 휴일작업 승인 요청

- 휴일 작업일(10일) : 7.1(토), 7.2(일), 7.8(토), 7.9(일), 7.15(토), 7.16(일), 7.22                    (토),  7.23(일), 7.29(토), 7.30(일)

○ 휴일 작업사유

- 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 통해 본선과 정거장 구조물 공정을 신속하게 추진하여 시민불편 해소에 만전을 기하기 위함.

○ 관련 비용부담 등

- 전면책임감리용역 입찰안내서 제6장 과업내용서 제1절6(감리대가의 조정)에

의거 휴일작업으로 인한 감리대가는 원인자인 시공사에서 부담

검토내용

○ 관련근거

- 전면책임감리용역 입찰안내서 제4장 계약조건 제14조 및 제6장 6.2

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제11조③항(건설사업관리기술자의 근무수칙)

○ 휴일근무의 적정성 및 비용부담

- 제출된 책임건설사업관리기술자의‘휴일작업 사유’및‘비용부담 주체’에 대해

명확하게 제시하고 있어 내용이 적정함

○ 감리원 휴일근무 내용

구 분	책임감리원 *** (4일)	감리원 *** (6일)
근무일	7.8(토), 7.9(일), 7.22(토), 7.23(일)	7.1(토), 7.2(일), 7.15(토), 7.16(일), 7.29(토), 7.30(일)
작 업 내 용	주형보 및 복공 해체, 되메우기 및 다짐, 기층 및 표층 포장, 보도블럭 설치, 가로수․가로등․교통표지판 시공, 준공청소 등

보고자 의견

○ 감리원 휴일근무 승인 요청내용을 검토한 결과, 정거장 및 본선구간의 구조물공 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정추진을 위해 감리원의 휴일근무가 적정하므로 아래와 같이 승인조건을 부여하여 감리원 휴일근무 계획을 승인코자 합니다.

< 감리원 휴일근무 승인조건 >

- 휴일작업 감리비는 시공사 부담

- 휴일작업 공종별 안전관리 담당자 지정 및 대책을 수립

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리에 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 근무하도록 감독

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독

- 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 감리원은 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리

- 휴일 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고

- 도로침하 및 파손 점검, 화재예방, 전기안전 점검 등 작업구간 정기 순찰 점검 실시

- 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 등 작업관리에 철저

- 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리에 철저

붙 임 : ‘17년 7월 휴일작업에 따른 감리근무계획 승인 요청 1부.  끝.