문서번호	녹지관리과-3362
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	진동엽	최병언	04/09 배호영
협 조

“서울창포원 공원환경개선 실시설계용역”

준공기한 연기 검토보고

2014. 04.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울창포원 공원환경개선 실시설계용역』

준공기한 연기 검토보고

『서울창포원 공원환경개선 실시설계용역』과 관련하여 준공기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

용역현황

❍ 용 역 명 : 서울창포원 공원환경개선 실시설계용역

❍ 용역기간 : 2014.02.12. ~ 2014. 04. 12.

❍ 도 급 비 : 금29,996,000원

❍ 용역개요 : 서울창포원 공원환경개선을 위한 우.배수 정비 및 초화류.

시설물 정비

❍ 도 급 자 : ㈜ 송림원 대표 임상규

준공기한 연기 검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2014.02.12. ~ 2014. 04. 12.

- 변  경 : 2014.02.12. ~ 2014. 04. 18.

❍ 연기사유

- 사업대상지내 우.배수 공사를 위해 측량실시 및 초화류와 식물 자문 검토에 따른 기간이 소요되어 준공 기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

❍ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기 검토결과와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.