등록번호

교통행정과-42244

★주무관

교통시설팀장

교통행정과장

안전건설교통국장

등록일자

2017.6.29.

인성분

조봉기

代유명선

06/29

이경우

결재일자

2017.6.29.

공개구분

대시민공개

협  조

건축과장

代이상홍

토목과장

김영철

안전치수과장

김귀용

		- 남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계용역 - 전문가 (재)설계자문회의 개최계획

서 대 문 구

교통행정과

- 남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계용역 -

전문가 (재)설계자문회의 개최계획

주택가의 주차난 해소를 위해 추진하고 있는 ‘남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계’와 관련하여 특정제품선정 심사위원회 심의결과에 따라 토류시설물 공법적정성 검토를 위해 다음과 같이 전문가 설계자문회의를 개최하고자 함.

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 남가좌2동 제2공영주차장 건설공사

위    치 : 서대문구 남가좌동 3-75외 8필지 (A=1,134㎡)

사업기간 : 2015.10. ~ 2017.10.

사업규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,731.55㎡, 주차면 101면

총사업비 : 9,497백만원 (시비 60%, 구비 40%)

위치도 및 현황사진

Ⅱ		추진경과

2014. 8.21. : 남가좌동 공영주차장 건립계획 수립(구청장 방침)

2014.10.17. ~ 2014.12. 8. : 타당성조사 용역

2015. 3.27. : 서울시 투자심사위원회 개최(결과 : 적정)

2015. 8.13. : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

2015.10. 8. : 실시계획 작성 고시

2015.11.30. : 보상계획 열람공고

2016. 2.29. ~ 2016.12.26. : 기본 및 실시설계용역

▶ 기본 및 실시설계 용역 현황

- 용 역 명 : 남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계용역

- 업 체 명 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정

- 추진경위

∘ 2016. 3. 4. : 용역 착수

∘ 2016. 6.30. : 주민설명회

∘ 2016. 9. 8. : 전문가 설계자문회의

∘ 2016.12.14. : 최종보고회

∘ 2016.12.26. : 준공

2016.10. 6. : 건축물 철거공사 계약

2016.10.11. : 남가좌2동 제2공용주차장 건립 사업계획 변경보고

2017. 1.12. ~ 2017. 1.21. : 건축물 철거공사 시행(4개 동)

2017. 4.27. : 특정제품선정 심사위원회 개최 (결과 : 불채택)

2017. 7.     : (서울시)공사 계약심사 의뢰(예정)

Ⅲ		(재)자문회의 개최계획

일    시 : 2017. 7. 5.(수) 14:00

장    소 : 제1회의실(서대문구청 본관 4층)

참석대상

- 서대문구

○ 안전건설교통국장, 교통행정과장, 건축과장, 토목과장, 안전치수과장

- 외부 전문가 자문위원

○ 토질 및 기초분야 : 박태순 교수 (서울과학기술대학교, 토질 및 기초기술사)

○ 토질 및 기초분야 : 이경수 상무 (보강테크, 토질 및 기초기술사)

※ 보고자 : ㈜대한콘설탄트 책임기술자

설계자문 내용

- 안  건 : 남가좌2동 제2공영주차장 토류시설물 공법 변경설계(안)의 적정성 여부 자문

- 재자문 사유 : 특정제품선정 심사위원회 심의 결과에 따라 토류시설물 공법 변경

▶ 특정제품 선정심사위원회 개최(2017. 4.27.)결과

- 안건명 : 남가좌2동 제2공영주차장 건설공사의 토류시설물 특정공법              (제품) 선정

∘ 품명 : 무 가시설 지하구조물시공방법, 지중차수벽형성용강관

- 심의결과 : 불채택

∘ 제시된 특정공법은 기존 공법과 비교 구조안정성, 경제성 등 측면에서       별다른 차이점이 없으며, 토류시설물의 접합부의 구조안정성 확보가       확실치 않아 보이므로 기존의 시공실적이 많은 공법으로 재검토

∘ 심의결과에 따라 변경된 설계(안)에 대해서는 기술자문을 거치기 바람.

Ⅳ		소요예산

소요예산 : 200,000원(구비)

- 자문수당 : 100,000원 * 2인 = 200,000원

- 예산과목 : 교통관리과, 주차질서 확립 및 주차난 해소, 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계), 유휴공지활용 노외주차장 설치, 일반운영비, 사무관리비

※ 자문수당은 별도의 책정된 예산이 없으므로 위 예산(사무관리비)에서 지출

Ⅳ		행정사항

회의개최 전 자문위원에게 자료 송부

전문가 설계자문 결과를 실시설계에 검토․반영   끝.