투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연장 요청(어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사)

1. 설비부-3033(2017.2.24.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’ 관련, 관급자재 대하여 납품기한 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연장 내용

품 명	계 약 자	계약금액	납품기한		납품요구번호 (계약번호)
			변경 전	변경 후
팬코일 유닛	에이스공조(주)	81,212000	2017.03.14.	2017.05.30.	121621501701
공기순환기(1)	㈜환경에스피	7,864,500	〃	〃	121625571900
공기순환기(2)	〃	6,724,510	〃	〃	121621601900
냉난방기(1)	삼성전자(주)	75,869,150	〃	〃	121621502100
냉난방기(2)	〃	7,172,000	〃	〃	121621502200
고무발포단열제	㈜하이코리아	135,870,410	〃	〃	121611877700
빌딩자동제어	㈜삼원씨앤지	603,000,000	〃	〃	(12162054600)
공기조화기	㈜삼화에이스	97,900,000	〃	〃	121621522500
엘리베이터	㈜금영제너럴	55,913,970	〃	〃	121621454700

나. 납품기한 연장사유 : 납품 시기 미도래

다. 납품기한 연장 귀책소재 : 본부

라. 지체상금 부과 여부   : 미부과

따로 붙임  1. 방침서 1부.

2. 납품기한 연장 관련문서(합의각서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	02/24 권오식
협조자
시행	설비부-3056	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개