문서번호	설비부-3834
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		권오식	04/10 박기형
협조
	주무관		김은덕

「구리암사대교 건설 전기공사」

관급자재(가로등) 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

도시기반시설본부

(설비부)

관급자재(가로등) 납품기한 연기 검토보고

『구리암사대교 건설 전기공사』에 소요되는 관급자재(가로등)에 대하여 책임감리원의 납품기한 연기요청이 접수되어 아래와 같이 검토 보고 드림.

Ⅰ		관급자재 현황

○ 계약현황

납품요구 번 호	품 명	규 격	수 량	계약금액(원)	계약업체	납품기한
12-13-1 -43258-00	가로등주	10m 1등용	53본	39,750,000	(주)이엔엘	`14.4.30
12-13-2 -51599-00	가로등기구	컷오프신형	53개	15,370,000	(주)이엔엘	`14.4.30
12-13-2 -51598-00	램프	250W	53개	6,890,000	(주)이엔엘	`14.4.30
	램프용 안정기	250W	53개
12-13-1 -49419-00	가로등주	8m 1등용	175본	178,320,000	에이컴조명(주)	`14.4.30
		12m 2등용	41본
12-13-2 -58437-00	가로등기구	150W	175개	50,589,000	㈜한영전기	`14.4.30
12-13-2 -58438-00	램프	150W	175개	14,682,500	㈜한영전기	`14.4.30
	램프용 안정기	150W	175개
12-13-2 -57964-00	LED 등기구	140W	82개	95,202,000	㈜천일	`14.4.30

Ⅱ		관 련 근 거

○ 암사(감리) 2014-214(‘14.04.08) : 구리암사대교 관급자재(가로등) 납품기한 연기 요청

Ⅲ		검 토 내 용

○ 주요내용 : 관급자재 납품기한 변경(※계약금액 변동없음)

- 변경내용

납품기한		변경사유	비 고
당 초	변 경
`14.4.30	`14.8.31	토목공사 공정 지연으로 가로등 설치시기 미도래	증)123일

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅳ		조 치 의 견

○ 검토내용과 같이 관급자재의 납품기한 연기를 건설총괄부에 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 및 계약변경합의서 각1부. 끝.