시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (18주)

2013 행정포털 개선사업의 18주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 4. 7. ~ 4. 11.  (18 / 26주차)

○ 추 진 율 : 63% (계획 64%)

- 지연사유 : 감리지적 사항(검사기준서) 작성 지연

○ 추진실적

- 사업관리 : 52% (계획 65%)

· 감리 시정조치계획 수립 및 결과 보완 (산출물 보완)

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템 개발 : 59% (계획 60%)

· 스토리보드 작성(통합검색, 관리자)

· 퍼블리싱 : 나의포털 진행(80%)

· UX전환 : 메인(60%) / 게시판(60%) / 개인화 (95%)

· 게시판 : 종합검색기능(50%), 관리자 기능 완료, 권환관리(80%)

- 시험 및 운영안정화 : 10% (계획 10%)

· 테스트 계획 작성 진행

붙임:  주간업무보고서(18주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/10 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-4708	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개