문서번호	시설과-875
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
변병수	김인규	전결 04/10 윤석우
협 조

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

고도시설부지 조경계획 변경 실정보고

2014.  4.

시설안전부

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

고도시설부지 조경계획 변경 실정보고

1		사업 개요

❍ 공 사 명	: 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
❍ 공사기간	: 2009.10.7 ~ 2014.10.30
❍ 도 급 비	: 62,868,000천원
❍ 시 공 자	: 고려개발(주)
❍ 감 리 자	: 범한엔지니어링 외 1개사
❍ 주요물량	: 고도정수처리시설110만톤/일
	구내관로(D2,700~1,200)부설 3,749m,관리본관 증,개축 1식

2		보고 및 검토 내용

1) 관련근거 및 검토사항

① 관련근거 :  업무지시 고도정수-199(2014.01.09.), 고도정수반-7534/(2013.12.23.)

생산관리과-820 2014.02.03

② 검토사항 :  ․ 업무지시 및 현장여건에 따른 일부수목 조정(추가,삭제)

․ 설계도서 누락물량 반영 및 옥상조경 시설물 삭제

변 경 사 항	검 토 내 용	비 고
젓나무 100주 삭제 ▸격자블럭 설치 외	-풍화암 사면으로 식재계획 변경 격자블럭설치 (오존접촉조 동측)
유실수 규격 조정 및 추가	-매실+살구나무 15주 (R8→R10) 규격 조정 -자두나무 15주 추가 식재
차폐수목 추가 및 자귀나무 삭제	-자귀나무(R8)52주 정수지內 꽃가루 비산 -경비초소(6개소) 기둥부분 차폐 식재	업무지시(고도정수-199) 2014.01.09
앉음벽 54m 추가	-도면 수량 누락
점토플랜트 및 전망대 삭제	-옥상 조경시설물(활성탄 흡착지,분배조 옥상)	업무지시 (고도정수반-7534) 2013.12.23
점토블럭▸Eco soil 투수성 점토블럭 변경	-정수슬러지 재활용 기술개발 제품으로 상수도 공사현장 적극 활용 요청에 따른 대체	생산관리과-820 2014.02.03

2) 정수센터 주요 요구사항 및 검토내용

3		공사비 변경 내역 검토

1) 도급공사비 주요 증감현황

단위 : 천원

구 분	주요 변경 현황	공 사 비 증,감
		변경전	변경후	증),감
1.수목 식재	-교목: 서양측백(H2.5) 54주 추가 ▸경비초소 6곳 기둥부분 차폐용 식재 매실 외 16주(R8→R10) 규격 UP 자두나무(R10) 15주 신규 추가 젓나무(H3.5)100주 삭제 ▸암사면으로 식재불가 격자블럭+잔디시공 자귀나무(H3.5) 52주 삭제 ▸정수지內 꽃가루 비산 우려 -관목: 회양목(H0.3) 외 1,800주 추가식재 ▸화살나무(1,000주) 휀스주변 보강식재 ▸회양목(700주) 아리수광장 보강식재 ▸줄사철(100주) 오존접촉조 남측 암사면 피복용 식재 -조경토쌓기(마운딩): 1,465㎥ 설계반영 ▸솔향기쉼터 2곳 마운딩 성토 (1.5M~2.5M)	624,484	622,443	감) 2,041
2.수목 이식제거		98,161	98,161	-
3.시설물 포장	-앉음벽(H450) 54M 증 ▸설계누락(당초: 49.9M →변경: 103.8M) -격자블럭포장 1,173m 증 ▸오존접촉조 동측 풍화암 사면으로 식재불가 -점토벽돌포장(1,348㎡) 및 스틸엣지 삭제 -Eco soil 투수성 점토블럭(1,348㎡) 변경	162,860	212,442	증) 49,582
4.옥상 녹화	-점토플랜트(H600) 981.4m 삭제 ▸활성탄흡착지 2개동 옥상설치 조경시설물 -전망대(우드블럭,난간대) 삭제 ▸분배조 옥상설치 조경시설물	123,450	45,934	감) 77,516
순공사비		1,008,955	978,979	감) 29,974
제 경 비		489,730	461,026	감) 28,704
도 급 비		1,498,685	1,440,005	감) 58,679

2) 공사비 검토 내용

가. 증감된 수량의 단가 적용

-기존의 계약단가가 있는 공종은 계약단가를 적용함.

-신규단가/견적단가는 협의율 83.95% 적용함.

나. 수량 산출서 및 기타 간접비 산출서 검토결과 타당하다 판단됨.

□ 당초 도면(식재)

□ 변경 도면(식재)

4		감리단 검토의견

1) 오존접촉조 동측사면 일대 풍화암 사면으로 식재가 불가한바 당초 식재계획(젓나무 100주)을 콘크리트 격자블럭과 잔디식재로 변경하고 남측사면 소나무 22주는 부지내에 배식 조정하고 덩쿨성식물 줄사철로 차폐 식재코자 함.

2) 경비초소(6곳) 기둥부분은 상록성교목(측백나무/H2.5)로 차폐 식재하고 부지내 자귀나무 52주는 정수지내 꽃가루비산 등 문제로 삭제하고 관목(화살나무,회양목)을 추가하여 경계울타리 주변과 아리수 광장에 보완 식재코자 하며 유실수는 당초 설계수량(감나무 외 42주) 내에서 규격(R8→R10)과 수종을 조정코자 함(자두나무 15주 추가)

3) 설계도서 누락분 앉음벽 54m(아리수광장)는 설계 반영하고 활성탄흡착지와 분배조 옥상조경 시설물 ”점토플랜트“ 및 “전망대시설” 은 삭제코자 함.

4) 환경교육마당 외 2곳(1,348㎡) 점토블럭 포장은 “정수슬러지 재활용 기술개발제품 상수도 공사현장 적극활용”에 따라 Eco-soil 투수성 소재인 점토블럭으로 대체 시공함이 타당함.

5		조치 의견

❍  고도시설부지 조경계획변경  실정보고에 대한 감리단 의견이 타당하므로 계약금액조정 검토 후 설계변경에 반영할 수 있도록 조치하고자 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고 1부.

2. 설계내역서 등  끝.

2014. 4.

보고자 : 지방시설주사 변 병 수