투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(가로등) 납품기한 연기 요청(구리암사대교건설 전기공사)

우리 부에서 추진하고 있는 『구리암사대교 건설 전기공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 다음과 같이 변경 요청합니다.

가. 계약명 : 구리암사대교 건설 전기공사 가로등주 외 3종 구매

나. 계약업체 및 변경내용

납품요구번호 (계 약 번 호)	품 명	계약금액(원)	계약업체	납품기한
				당초	변경
12-13-1-43258-00 (00135033700)	가로등주	39,750,000	(주)이엔엘	`14.4.30	`14.8.31
12-13-2-51599-00 (00128171901)	가로등기구	15,370,000	(주)이엔엘	`14.4.30	`14.8.31
12-13-2-51598-00 (00128127101)	램프	6,890,000	(주)이엔엘	`14.4.30	`14.8.31
	램프용 안정기
12-13-1-49419-00 (00135029502)	가로등주	178,320,000	에이컴조명(주)	`14.4.30	`14.8.31
12-13-2-58437-00 (00128152702)	가로등기구	50,589,000	㈜한영전기	`14.4.30	`14.8.31
12-13-2-58438-00 (00128121301)	램프	14,682,500	㈜한영전기	`14.4.30	`14.8.31
	램프용 안정기
12-13-2-57964-00 (00128205701)	LED 등기구	95,202,000	㈜천일	`14.4.30	`14.8.31

다. 연기 사유 : 관급자재 설치시기 미도래

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2 계약변경 합의서 1부.

3 관급자재 계약서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	지장환		열빛총괄과장	권오식		설비부장	04/10 박기형
협조자	경리과장	최영미
시행	설비부-3888	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 14층 도시기반시설본부 설비부	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	대시민공개