문서번호	시설보수과-2460
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	07/06 정흥순
협 조

- 난지수계 차집관로 내부조사 용역 - 준공기한 연기 보고

2017. 7

난지물재생센터

(시설보수과)

- 난지수계 차집관로 내부조사 용역 -

준공기한 연기 보고

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 난지수계 차집관로 내부조사 용역

❍ 용역기간 : 2017. 4. 19 ~ 2017. 7. 17

❍ 용역위치 : 홍제천 및 불광천 차집관로(사각)

※ 공정율 : 내부조사 완료(공정율 : 80%)

❍ 총용역비 : 176,550,000원

□ 보고내용

❍ 현재 홍제천 및 불광천 차집관로(사각) 내부조사는 완료한 상태이나, 내부조사한 사항을 바탕으로 면밀한 보수공법 선정이 필요한 실정으로 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기가 불가피한 실정임.

□ 조치의견

❍ 준공기한은 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

- 당 초 : 2017. 4. 19 ~ 2017. 7. 17

- 변 경 : 2017. 4. 19 ~ 2017. 8. 18

- 연기 귀책사유 : 난지물재생센터

- 지체상금 부과여부 : 미부과  끝.