문서번호	설비부-3846
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	04/10 박기형
협조

『장충체육관 리모델링 통신공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회, 제2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

도시기반시설본부

(설비부)

『장충체육관 리모델링 통신공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회, 제2회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 『장충체육관 리모델링 통신공사』에 대하여 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청이 있어 검토한 결과임

공사개요

공사명 : 장충체육관 리모델링 통신공사

도급액 : 금501,147,060원(1차 금226,242,000원/2차 금274,905,060원)

준공기한 : 2014. 8. 31.(1차 2014.5.31./2차 2014. 8. 31.)

시공사 : (주)디투엔지니어링

감  리 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소외 1

관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제73조

JCR14-79호(2014.4.7.) ‘통신공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건 검토

검토내용

조정요건 충족 여부

구분	기준시점일	비교시점일	경과일수	지 수 조정율(%)	검토결과
제1회	2012.7.4	2013.1.1	181일	3.9	요건충족
제2회	2013.1.1	2013.9.1	243일	3.11	요건충족

※ 충족 요건 : 경과기간이 90일 이상이고 조정율이 3% 이상

물가변동 산출 내용

금액 : 원

연번	구 분		제1회	제2회	비 고
1	물가변동대상 계약금액(B)		501,147,060	520,623,060
2	물가변동 적용 제외 계약금액(C)		1,759,000	92,350,000
3	물가변동 조정기준일 현재 공정율	예정 공정율	0.35%	17.738%
		제외 공정율	0.35%	17.738%
4	물가변동 적용 대가(D)		499,388,060	428,273,060	D=(B-C)
5	물가변동 조정율(A)		3.90%	3.11%
6	물가변동 등락 대상 조정금액(G)		19,476,000	13,319,000	G=(A×D)
7	선급금 공제금액		0	0	선급금 없음
8	물가변동 조정 적용 금액		19,476,000	13,319,000

공사비 조정 내용

구분	계약금액 (총차)	ESC 증액		조정금액	비 고
		제1회	제2회
도급비(원)	501,147,060	19,476,000	13,319,000	533,942,060	증32,795,000

감리 검토 의견

- 물가지수 산출이 적정하며, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청 내용이 관련 규정에 적합함

조치계획

장충체육관 통신공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회, 제2회) 신청 건은 감리단 검토 의견이 적합한 것으로 판단돼 승인 조치하고 향후 설계변경시 반영

붙 임 : 장충체육관 리모델링공사 책임감리단 검토내용 1부.  끝.