문서번호	설비부-3836
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		권오식	04/10 박기형
협조
	주무관		김은덕

「구리암사대교 건설 전기공사(3차)」

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

도시기반시설본부

(설비부)

「구리암사대교 건설 전기공사(3차)」

준공기한 연기 검토보고

우리 부에서 시행 중인 『구리암사대교 건설 전기공사(3차)』와 관련, 준공기한 연기를 위한 검토 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

○ 위   치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

○ 공사규모 : 폭 4~6차로, 연장 2.7km(교량 1.1km, 연결도로 1.6km)

○ 공사기간 : '10.07.28 ~ '14.12.31 (3차 `13.2.28 ~ `14.04.30)

○ 도급금액 : 총차 5,249백만원 (금차 1,389백만원)

○ 시공사/감리사 : 모범전설(주) / (주)도화엔지니어링

Ⅱ		관 련 근 거

○ 암사감리 2014-215(‘14.04.08) : 구리암사대교건설 전기공사(3차공사) 준공기한 연기 요청

Ⅲ		검 토 내 용

○ 준공기한 연기

차 수	공사기간		비 고
	당 초	변 경
3 차	`13.2.28 ~ `14.4.30	`13.2.28 ~ `14.10.31	계약금액 변동없음

○ 감리단 검토 의견

- 전기3차 공사는 아천 및 암사 IC 램프, 올림픽도로, 강변북로 등에 가로등을 설치하는 공종

으로서 토목공사 진행에 따라 시공이 가능한바, 토목공사지연으로 준공기한 연기가 타당함.

○ 조치의견

- 감리단 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 지체상금 부과없이 ｢구리암사대교건설 전기공사3차｣

준공기한을 연기하고자 함.

Ⅳ		행 정사 항

○ 위 내용과 같이 재무과로 준공기한 연기 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 공문(합의각서 포함) 1부. 끝.