문서번호	급수운영과-7455
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장	중부수도사업소장
김두수	최현태	김영삼	04/10 안운길
협 조
	시설관리과장		나태산
	주무관		한상근

'14년 수도계량기 보호통 보온재 정비계획

2014. 4.

중부수도사업소

( 급수운영과 )

’14년 동파취약 계량기 보호통 보온재 정비계획

수도계량기 보호통 전수 조사 결과 보온재가 파손, 망실 되거나 몸체의 변형으로 보온재(스티로폼)의 교체가 불가한 보호통에 대하여 PE재질의 보온재로 대체 설치하여 동파를 최소화 하고자함.

□ 관련근거

○ 수도계량기 보호통 보온재 정비계획【급수설비과-1914(’14.03.24)】

□ 정비개요

○ 사업기간 : 2013~2017년

○ 전수조사 : ’13년 3～5월

○ 정비대상 : 3,952개(금년 1,317개)

○ 정비기간 : ’14년 4～10월

○ 정비예산 : 42,000천원

※ 예산과목 : 배급수비, 지원사업성시설비, 수도계량기 보호통 보온재 등 정비

□ 2013년 정비실적

○ 정비대상 : 2,150개

○ 실    적 : 2,150개(100%)                                    ( 단위 : 개 )

구분	계	급수운영과			시설관리과
		소계	용산구	중구	소계	종로구	성북구
계	2,150	937	599	338	1,213	537	676
15mm	2,150	937	599	338	1,213	537	676

□ 2014년 세부 정비계획

○ 정비기간 : 2014. 4 ~ 10월

○ 소요예산 : 42,000천원

○ 목 표 량 : 1,317개                                               ( 단위 : 개 )

구분	계	급수운영과			시설관리과
		소계	용산구	중구	소계	종로구	성북구
소요예산 (천원)	42,000	22,000	13,000	9,000	20,000	8,000	12,000
계	1,317	692	411	281	625	257	368
15mm	337	158	158	0	179	26	153
20mm	818	453	212	241	365	191	174
기타	162	81	41	40	81	41	40

○ 정비방법

- 상수도 공사 수탁업체에 작업지시 후 정산

- 보호통 보온재 자재는 사급으로 스티로폼이 아닌 일체형 PE보온재로 정비

- 개소당 소요예산은 28,600원(설치비:14,600원, 재료비:13,800원)

○ 월별 정비계획                                                      (단위 : %)

계	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
100 (누계)	10	40	60	70	80	100	100

□ 행정 사항

○ 매월 5일까지 ’14년 전월 추진 실적을 상수도사업본부에 보고(5월부터)

붙 임 : ‘14년 보호통 보온재 정비 대상 및 실적 보고 양식 각 1부. 끝.