문서번호	원무과-12242
결재일자	2017.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
박슬기	조선행	김종환		07/11 박찬병
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		박영숙A
	약제부장		정덕숙

- 동관 외래 채담실 구축 및 재배치 설계용역 -

착수보고 및 기본계획 보고

2017. 7.

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 동관 외래 채담실 구축 및 재배치 설계용역 -

착수보고 및 기본계획 보고

결핵 감염예방을 위한 ‘동관 외래 채담실 구축 및 재배치’ 설계용역 착수 및 기본계획을 보고함

1		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 동관 외래 채담실 구축 및 재배치 설계용역

○ 용역업체 : ****************

○ 용역내용 : 채담실 구축, 진료실·주사실 등 실 재배치 설계

○ 용역범위 : 동관 2층 약 110㎡

○ 용역기간 : 2017. 6. 13. ~ 8. 11.(계약일로부터 60일)

○ 용역금액 : 금9,610,000원(금구백육십일만원)

2		추 진 경 과

○ ‘17. 5. 17. : 동관 외래 채담실 구축 및 재배치 방침

○ ‘17. 6. 14. : 설계용역 착수(‘17. 6. 13. 용역계약)

○ ‘17. 6. 15. : 설계자 현장확인 및 실측

○ ‘17. 6. 21. : 기본계획(안) 회의(진료부, 간호부, 원무과)

○ ‘17. 6. 27. : 처치/주사실 배치(안) 회신(간호부)

○ ‘17. 6. 28. : PPM/연구실 좌석배치(안) 회신(진료부)

○ ‘17. 6. 30. ~ 7. 10. : 기본계획 보완(진료부 및 간호부 협의)

3		기본계획(안) 회의

○ 일  시 : 2017. 6. 21.(수) 10:00~10:40

○ 장  소 : 동관 2층(외래)

○ 참석자

- 진료부 : 진료부장, 진료기획팀장

- 간호부 : 김유리팀장, 민난희 동관외래간호사

- 원무과 : 시설팀장, 건축담당, 기계담당

○ 회의내용 : 실 재배치 기본계획(안) 설명 및 의견수렴

○ 회의결과(요구사항)

- 진료부

· 진료실과 주사실 사이 출입문 위치 및 종류 재검토

(소음이 발생하더라도 미닫이문 설치 요망)

· 진료실 침대삭제 / 각 실간 소음차단

· PPM/연구실 직원 의견 수렴 후 좌석배치 회신

- 간호부

· 처치/주사실 배치(침대, 비품, 산소 등) 추후 회신

· 간호사실 냉·난방, 환기 고려 요망

- 원무과

· 진료부 및 간호부 요구사항 최대한 반영(예산범위)

4		기 본 계 획

○ 변경 전

○ 변경 후

* 실 배치계획은 설계 또는 공사 중 변경될 수 있음

5		향 후 계 획

○ 실시설계를 위해 설계자와 수시협의

○ 진료부 및 간호부 관계자 수시협의 및 의견 최대한 반영.

붙 임 : 동관 외래 재배치 전·후 1부.  끝.