문서번호	도로관리과-5795
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장관리팀장	도로관리과장
이유국		최연우	04/11 최동필
협조	도로관리팀장		代조용상
	도로안전시설팀장		김순수

’14년 노후포장도로 정비예산 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
포장현안사항회의(‘14.4.2)	6개 도로사업소 (포장담당)	우기전 공사착수를 위해 조속 예산 재배정 협조	조속 예산재배정	30,900백만원

(도로관리과)

2014년 노후포장도로 정비예산 재배정 계획

노후 포장도로와 굴착복구 완료구간중 불량도로를 대상으로 정비예산 집행계획을 수립, 도로사업소에 재배정하여 평탄하고 안전한 도로환경을 조성하고자 함.

□ 정비예산 배정현황(‘14)

(단위 : 천원)

예산현액			예산배정액	예산배정 내역	배정잔액
노후포장		51,592,000	14,587,274	긴급복구 공사비 (‘14. 2. 3) : 9,000,000 ※ 하반기 재배정(예정) : 3,600,000 맨홀정비 (‘14. 2.13) : 3,600,000 예방적유지보수 등(‘14.3.11) : 1,300,000	33,404,726
	시 설 비	50,904,726	13,900,000		33,404,726
	감 리 비	687,274	687,274		-

※ 감리비 예산 재배정 : ‘14. 2. 7

□ 노후포장도로 정비계획 (’14)

○ 정비요청 : 69개 노선 181개소, 면적  10,093a

○ 정비예산 : 32,589백만원(도로굴착복구기금 4,500백만원 포함)

○ 시행기관 : 도로사업소(6개소)

○ 공사기간 : ’14. 4.~’14.12

○ 시행방법 : 사업소별 단위사업으로 공사발주 시행

□ 정비예산 배정기준

○ SPI≤6이하 대상구간 중 육안 현장점검과 코아 채취결과, 포장상태가 불량지역 우선정비

○ ‘14년 노후포장도로 정비예산 범위내 사업소별 관할면적과 노후 포장도로 정비공사 예산요구액 기준

□ 사업소별 예산 재배정계획

○ 예산 재배정계획(’14)

(단위 : 백만원)

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	32,589	5,261	6,168	4,494	6,332	6,469	3,865
노후포장도로정비공사	28,089	4,661	5,118	3,894	5,732	5,419	3,265
굴착복구기금 (사후정비)	4,500	600	1,050	600	600	1,050	600

○ 예산과목

【노후포장도로 정비예산】

- (정책)도로시설물 관리, (단위)도로 및 도로부속물 관리 - 도시개발, (세부사업) 노후포장도로 정비공사, (편성목) 시설비 및 부대비, (통계목) 시설비(205-401-01)

【도로굴착복구기금 사후정비비】

- (조직) 도로관리과, (부문) 도로, (정책) 도로시설물 관리, (단위) 도로굴착복구-도로굴착복구기금, (세부사업) 도로굴착복구공사, (편성목) 시설비 및 부대비, (통계목) 시설비

□ 행정사항

○ 포장관리 대표거리 정비구간 : 포장, 맨홀, 측구 및 노면표시 일제 정비

- 대표노선(안) : 성산로(1.5㎞, 1,648백만원)-서부, 동일로(1.7㎞, 1,944백만원)-성동

※ 포장이 양호한 구간은 예방적 유지보수 공법(표면처리, 균열보수) 적용

○ 도로굴착복구기금(사후정비) : 특별시도상 도로굴착복구 시행노선 중 SPI 6이하 구간 우선정비

○ 노후 포장도로 정비공사 조속 발주 및 공사 착수 (’14. 5월)

□ 향후계획

○ ’14. 4 : 공사발주 및 계약

○ ’14. 5 : 공사착수

○ ’14. 5~11 : 공사시행

덧붙임 : 1. 2014년 노후포장도로 정비대상 조정결과.

2. 2014년 굴착복구시행도로 사후정비대상.  끝.